문서번호	도로보수과-10202
결재일자	2019.10.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정회곤		류태용	10/22 代박종윤
협조

2019년 포장도로 긴급복구공사 작업지시(제5차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

강서도로사업소

도로보수과

- 2019년 포장도로 긴급 복구공사 -

작업지시(제5차) 계획 보고

동절기 대비 우리 사업소에서 관리하는 시도상 도로소파(예상)지역 및 균열 등이 발생한 구간에 대해서 긴급복구 공사업체에 작업지시하여 보수․정비하고자 함

□ 사업개요

❍ 공 사 명: 2019년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

❍ 공사규모: 절삭덧씌우기 197a, 소파포장 34a, 긴급출동/대기 1,290hr

❍ 공사기간: 2019. 3. 27. ~ 12. 13.

❍ 공 사 비: 2,117백만원(도급비 1,378, 관급비 490, 이전비 249백만원)

❍ 도 급 자: 향일건설(주) 정윤상

□ 작업지시

❍ 작업세부내역
연번	위치		방향	지시물량			작업방법		작업조건		적용 기준	차로	비고
				폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	인력	기계	주간	야간
1	영중로 35 (CU클린업피부과의원 앞), 3차로		영등포역	5.4	98.4	531.4		■		■	10a	6	T=5cm
1-1	영중로 3 (헌혈의집 앞), 3차로		영등포역	4.5	50.5	227.3		■		■	10a	6	T=5cm
2	경인로 847 (선한의원 앞), 3차로		도림교	5.3	62.1	329.1		■		■	10a	6	T=5cm
2-1	영중로 10길1 (웰빙천국 앞), 3차로		영등포시장역	4.0	70.5	282.0		■		■	10a	4	T=5cm
3	오목로 (오목교역 → 오목교 진입 전)		오목교	9.3	17.5	162.8		■		■	5a	4	T=5cm
4	신정로 312 (신트리공원 교차로)		신트리공원	3.5	14.5	50.8	■			■	인력	4	T=7.5cm
5	양천로 743 (나이아가라관광호텔 앞), 2차로		양화교	4.2	33.5	140.7		■		■	5a	4	T=10cm
6	개화동로 27길9 (방화중학교 월편), 버스정류장		외발산사거리	4.6	47.3	217.6		■		■	5a	6	T=10cm
7	방화대로 319 (세븐일레븐 앞), 버스정류장		신방화역	3.3	23.8	78.5	■			■	인력	6	T=7.5cm
8	경인로 313 (경서농협개봉지점 앞), 버스전용차로승강장		오류IC	3.4	22.4	76.2	■	■		■	인력 기계	6	기층개량 기층 12.5cm 표층7.5cm
9	경인로 40길11 (영화아파트 월편), 버스전용차로승강장		구로소방소	3.7	32.4	119.9	■	■		■	인력 기계	6	기층개량 기층 12.5cm 표층7.5cm
10	양천로 373 (제일제당 앞), 버스정류장		양천향교역	3.3	26.4	87.1	■			■	인력	6	T=7.5cm
11	신정로 167 (서부트럭터미널 경동택배 앞), 3차로		궁둥터널	4.3	73.4	315.6		■		■	5a	6	T=5cm
12	남부순환로 (학마을1단지 앞), 버스정류장		신월IC	3.5	23.4	81.9	■			■	인력	4	T=7.5cm
13	신정로 213 (금옥여자고등학교 앞), 버스정류장		궁동터널	3.1	27.1	84.0	■			■	인력	6	T=7.5cm
14	양천로 349 (춘향골남원추어탕 앞), 좌회전차로		서울식물원	4.2	90.4	379.7		■		■	10a	6	T=7.5cm AP-Grid
14-1	양천로 353 (이조면옥 앞), 1~3차로		양천향교역	9.2	50.2	461.8		■		■	10a	6	T=7.5cm AP-Grid
15	강서로 307 (서울스타병원 앞), 버스정류장		화곡터널	3.6	23.5	84.6	■			■	인력	6	T=7.5cm
16	곰달래로 42 (연세안경마트 앞), 2차로		까치산역	3.8	21.2	80.6	■			■	인력	4	T=7.5cm
17	신정로 170 (현대6차아파트 107동 앞), 3차로		신트리공원	3.8	22.3	84.7	■			■	인력	6	T=7.5cm
18	신정동 735-5 (서부트럭터미널교차로 앞), 3차로		신월IC	3.6	23.4	84.2	■			■	인력	6	T=7.5cm
19	신정동 1322 (신정이펜하우스2단지 201동 앞), 버스정류장		까치울터널	3.8	22.5	85.5	■			■	인력	6	T=7.5cm
20	여의동로 (윤중초교교차로 → 샛강역), 2차로		마포대교	3.3	48.6	160.4		■		■	5a	4	T=5cm
21	여의서로 (여의하류IC → 여의서로 진입부 방향), 3~4차로		여의2교	8.1	52.3	423.6		■		■	5a	4	T=5cm
22	여의서로 하부도로 (버들광장 가로등14 앞), 2차로		샛강역	4.4	19.8	87.1	■			■	인력	4	T=7.5cm
23	국회대로 673 (동아빌딩 앞), 4차로		목동교	4.0	16.4	65.6	■			■	인력	8	T=7.5cm
24	국회대로 628 (드림테크 앞), 4차로		여의2교	3.8	20.6	78.3	■			■	인력	8	T=7.5cm
25	화곡로 32 (제일빌딩 앞), 3차로		화곡로입구교차로	3.3	23.3	76.9	■			■	인력	6	T=7.5cm
26	화곡로 6 (신월동자동차매매시장 지난), 2차로		화곡로입구교차로	3.4	24.6	83.6	■			■	인력	6	T=7.5cm
27	신월로 (신월 시영아파트입구 버스승강장앞), 3차로		강월초교입구교차로	3.8	19.7	74.9	■			■	인력	6	T=7.5cm
28	신정동 1316-8 (신정이펜 하우스, 3단지 313동 앞), 좌회전차로		강월초교입구교차로	3.2	75.4	241.3		■		■	5a	6	T=5cm
29	신월로 97 (강월초등학교 앞), 2차로		부천	3.4	85.4	290.4		■		■	5a	6	T=5cm
30	강서로 321 (진로그린식자재마트 앞), 1~2차로		우장산역	6.2	11.5	71.3	■			■	인력	6	T=7.5cm
31	염창동 259-6 (양화교 → 증미역 방향), 직3차로		증미역	4.2	15.4	64.7	■			■	인력	6	T=7.5cm
32	곰달래로 53 (LG U플러스 앞), 1~2차로		서서울호수공원	6.3	14.2	89.5	■			■	인력	6	T=7.5cm
33	강서로 300 (강서농협은행 앞), 버스전용차로		발산역	3.1	27.3	84.6	■			■	인력	6	T=7.5cm
34	오목로 231 (빽다방 앞), 2차로		신정역	3.3	56.7	187.1		■		■	5a	6	T=10cm
35	오목로 195 (SH수협은행 앞), 2차로		신정역	3.4	46.8	159.1		■		■	5a	6	T=10cm
36	가마산로 198 (스마일감자탕 앞), 1~2차로		구로구청	7.4	28.4	210.2		■		■	5a	6	T=10cm
37	긴급소파보수 (상온아스콘)					20일	■			■	인력
계					1,463	5,699

□ 작업기간 및 소요예산

차수	작업기간	소요예산(원)	비고
5차	2019. 10. 23. ~ 11. 15.	401,480,000	부가세 포함

※ 시공물량에 따라 추후 정산

□ 조치계획

❍ 위 사항을『2019년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)』업체로 하여금 보수․정비토록 작업지시하고, 실측물량에 의거 추후 설계변경하여 반영 조치하고자 함.

붙임 1. 작업지시 내역서(5차) 1부.

2. 5차 작업 위치도 및 현황사진 1부.  끝.