문서번호	시설관리과-21001
결재일자	2019.10.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
이한수	정진호	이경희		10/22 배현숙
협 조

『2019년 유량계 유지보수용역(연간단가)』

추진실적 및 설계변경 계획

2019. 10

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 유량계 유지보수용역(연간단가)

추진실적 및 설계변경 계획

중블록, 아리수올림터, 배수지 유량계의 원할한 유지관리를 위하여 시행 중인 『2019년 유량계 유지보수 용역(연간단가)』와 관련 추진실적 및 설계변경 계획을 보고 드림

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 2019년 유량계 유지보수용역

○ 계약기간 : 2019. 4. 1. ～ 2020. 3. 31.

○ 변경전 계약금액 : ******************************

○ 계약상대자 : ***************

○ 계약내용

- 구역, 중블록, 아리수올림터, 배수지 유량계 점검 34개소

- 원격감시제어반 점검 1개소

- 아리수올림터, 배수지 교정검사 19개소

- 유량감시시스템 DB추가 8건

- 수선자재교체 및 긴급 보수 등

□ 유량계 유지보수용역 추진 실적

차수	작업기간	작업내용	기성여부	비고
1차	2019.5.16. ~ 2019.6.21.	유량계 점검 34개소 원격감시제어반 점검 1개소 교정검사 실시 1. 500mm 미만 3개소 2. 1000mm 이상 2000mm 미만 1개소 유량감시시스템 DB추가 2개소 전송반 외함세척 26개소 강관 천공 작업 및 압력계 설치(신규공정) 휴대용 유량계 보수(신규공정)	기성완료	추가공정 및 신규공정은 설계변경 후 지출예정
2차	2019.6.28. ~ 2019.7.5.	교정검사 실시(500mm이상 1000mm미만 1개소)	기성예정
3차	2019.7.24. ~ 2019.8.9.	압력계 교체(KSM-7)	기성예정
4차	2019.7.26. ~ 2019.8.9.	유량계 점검 5개소 교정검사 실시 1. 500mm 미만 3개소 2. 500mm 이상 1000mm 미만 1개소 전송반 외함세척 3개소 스틸볼라그(안전대) 제거 1개소(신규공정) 건식센서 교체	기성예정
5차	2019.9.2. ~ 2019.10.11.	유량계 점검 34개소 원격감시제어반 점검 1개소 교정검사 실시 500mm 미만 10개소 500mm 이상 1000mm 미만 1개소 1000mm 이상 2000mm 미만 2개소 전송반 외함세척 27개소	기성예정

□ 설계변경

○ 설계변경 사유 : 제 1~5차 작업결과 물량 증감 및 신규물량 발생

○ 설계변경 내용

- 계약기간 : 변경없음

- 총계약금액 : 감소

(단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 ․ 감 액
총 용 역 비		39,121,260	39,120,500	감760
1차수	‘19년 계약금액	32,171,000	33,673,490	증1,502,490
2차수	‘20년 계약금액	6,950,260	5,447,010	감1,503,250

구 분	공 종	비 고
물량 증가	유량계 점검 등 6건
물량 감소	유량감시시스템 DB추가 등 6건
신규 물량	강관 천공 작업 및 압력계 설치 등 3건

- 물량변경

□ 조치의견

○ 상기와 같이 유량계 유지보수 용역 시행 중 발생한 신규물량 및 물량 증감 건에 대한 설계변경을 위하여 『설계변경 심의위원회』를 개최하고자 하며,

○ 심의결과를 반영하여 계약변경 시행하고자 함.

붙임 :  1. 설계변경내역서 1부.

2. 신규공종 및 물량증감 현황 1부.

3. 작업지시내역서(1~5차) 1부.  끝.