“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(2019년 원효대교 보수공사)

1 교량안전과-17840호(2019.10.22.)와 관련입니다.

2 우리 시에서 추진 중인『2019년 원효대교 보수공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2019년 원효대교 보수공사

나. 공사기간 : 2019. 4. 9.~ 2019.11. 4.

다. 도 급 자 : 실리기업주식회사 대표 김홍식

라. 도 급 비 : 금530,441,700원

마. 준공기한 변경 내용

- 당초 : 2019. 4. 9.~ 2019.14. 4.

- 변경 : 2019. 4. 9.~ 2019.12.20.

바. 귀책사유 : 발주처 (지연배상금 미부과)

사. 연기사유

- 관급자재(아스콘) 계약지연

아. 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 원효대교 보수공사, 시설비및부대비,시설비

붙임 1). 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2). 준공기한 연기의뢰서 1부.

3). 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	서성만		특수교량팀장	정준용		교량안전과장	10/23 김종호
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-17859	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층 교량안전과	/
전화	02-2133-1952	/전송	02-2133-1429	/		/	대시민공개