문서번호	건축부-18309
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축총괄과장	건축부장
박진국		유현수	10/24 임인구
협조
	★주무관		김성권

「세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)」

1차 준공 정산 및 검사결과 보고

2019. 10.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)」

1차 준공 정산 및 검사결과 보고

『세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)』의 1차 공사가 완료됨에 따라 해당 건설사업관리자로부터 제출된 준공검사 결과를 보고 드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)

○ 위    치 : 서울시 중구 을지로 158번지 일대

○ 공사개요 : 보행데크 신설‧정비, 공중보행교(2개소), 지하연결통로(2개소)

○ 계약현황

구분	계약금액	공사기간	비 고
총차	***************	2018. 9. 10. ~ 2020. 5. 9.
1차	3*************	2018. 9. 10. ~ 2019. 9. 28.	금회준공
2차	19*************	2018. 8. 20. ~ 2020. 5. 9.	진 행 중
잔여	**	-	-

○ 시 공 자 : 에스테크건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 자 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소 외 1개사

2		추진경위

○ ‘18.08.23. : 공사계약 및 착수(‘18.09.10)

○ ‘19.09.27. : 1차 공사 준공계 제출 (시공사 → 건설기술용역업자)

○ ‘19.09.30. : 준공검사 수행계획 보고 (건설기술용역업자 → 건축부)

○ ‘19.10.08. : 준공 검사

○ ‘19.10.11. : 1차 준공검사 결과 보고 (건설기술용역업자 → 건축부)

3		1차 준공 정산 내역

○ 관련근거

-「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제8절 보험료 사후 정산 등

- 토문 제2019-955호(2019. 10. 11.) : 제1차 준공검사 결과 보고

○ 계약금액 변경(총차 및 1차분)                                      (단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	증·감	비 고
***	**************	**************	************	********
**	3************	3************	************

○ 준공정산 세부내용

- 1차 공사 정산금액 (붙임 준공정산 내역 및 증빙자료 참조)                     (단위 : 원)

구 분	계약금액	정산금액	증감액
*********	**********	**********		***********
*********	*********	*********		***********
*********	**********	*********	**	*********
*********	**********	*********	**	**********
*********	*******	*******	**	*********
*******	*********	*********		***********
*********	**********	**********		***********
*********	**********	**********		***********
*********	***********	***********		***********
***************	652*****456	650*****696	**	*********
****			**	**********

- 1차 공사 총괄내역                                             (단위:천원)

도급액	전회기성	금회기성	누계기성	정산액	실지급액
3********	5***900	3*****100	3*****000	***000	3*****000

4		책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 1차 공사에 대하여 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 준공되었음

5		처리의견

○ 계약금액 조정 검증 확인서상 1차수는 상한 초과(사유 : 입찰공고문에 국민건강보험료 등은 산출내역서의 금액을 조정없이 반영)가 있으나, 총차 기준으로 초과가 없으므로 적합(모든 제비율은 총차 준공기준으로 기준 비율 초과하지 않도록 관리)함.

【기술심사담당관 강신영 주무관과 유선 확인】

○ 책임건설사업관리기술자의 1차수 준공검사 검토의견 및 정산결과에 따라 공사금액 조정하여 1차수 준공처리코자 함

붙임 : 1) 1차 준공검사 결과보고 관련서류(준공정산 내역서 등)

2) 계약금액조정 검증 확인서.  끝.