문서번호	토목부-19285
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		장수철	전결 10/24 김용제
협조

포장공 설계누락 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 10.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

포장공 설계누락 검토보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

본 공사 시행중 포장공(잔디블럭포장 등)에 대한 설계가 누락되어 검토 보고 하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 11.

○ 도 급 비 : 7,145백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 보고 내용

❍ 현 황 (위치도)

잔디블럭포장 (설치단가누락)

잔디블럭포장 (설치단가누락)

콘크리트 보도하단부 배수 PVC PIPE 설치

콘크리트 보도하단부 배수 유공관 설치

□ 검토내용

○ 내역검토

공 종	규 격	단위	수량	단가	증감 금액 (직접공사비)
보차도경계석	180X200X1000 (곡선)	M	70	58,082	4,065,740
보차도경계석	200X250X1000 (직선)	M	110	50,656	5,572,160
보차도경계석	200X250X1000 (곡선)	M	15	68,099	1,021,485
보차도경계석	180X200X1000(재사용)	M	65	10,531	684,515
골재운반비	덤프 24톤(L=58.6km)	m3	3408	18,663	63,603,504
PVC파이프 설치	∅100,쇄석25mm포함	개소	3270	3,605	11,788,350
잔디블럭포장(설치)	333×333×60	m2	765	22,589	17,280,585
인조화강블럭포장	200x200x60 (설치비)	m2	288	14,434	4,156,992
아스콘포장(T=5cm)	인력식 소규모장비	a	13.50	586,249	7,914,361
아스콘포장(T=10cm)	인력식 소규모장비	a	13.50	298,665	4,031,977
보조기층공(T=15CM)	인력식 소규모장비(시공량150㎥/일당)	a	13.50	158,858	2,144,582
입도조정기층공(T=20CM)	인력식 소규모장비(시공량135㎥/일당)	a	13.50	235,122	3,174,146
유공관설치	Φ-100(쇄석,부직포)	M	340	20,490	6,966,600
사각맨홀인상(콘크리트)	620	개소	2	302,567	605,134
사각맨홀인상(아스팔트)	620	개소	1	281,771	281,771
상수도맨홀인상(콘크리트)	D=600	개소	2	416,458	832,916
기타맨홀인상(아스팔트)	D=900	개소	4	418,824	1,675,296
경계석 버너		M	2531	8,640	21,867,840
인력비빔타설	t=20cm,인력 (카스토포 기초)	m3	5.70	469,596	2,676,696

○ 공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증·감 금액
1. 직접공사비 계	204,305,684	364,791,503	증	160,485,819
2. 제 경 비 계	48,700,328	86,053,572	증	37,353,244
순공사원가	253,006,012	450,845,075	증	197,839,063
3. 일반관리비	13,409,318	23,894,788	증	10,485,470
4. 이 윤	20,914,669	39,405,592	증	18,490,923
공 급 가 액	287,329,999	514,145,455	증	226,815,456
5. 부 가 가 치 세	28,733,001	51,414,545	증	22,681,544
도급금액	316,063,000	565,560,000	증	249,497,000
관급자재비		77,334,602	증	77,334,602
총공사금액	316,063,000	642,894,602		326,831,602

□ 감리단 검토 내용

❍ 포장공에 대한 누락 및 신규공종의 검토 결과 적정한 것으로 판단되며 단가는 품셈기준으로 산출함.

□ 조치의견

❍ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증)327백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.