문서번호	시설과-4472
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장
이태준	박관현	10/24 임원빈
협 조	총무과장		김춘섭
	유물관리과장		한은희

서울역사박물관  수장고 재배치 통신공사 설계변경 보고

2019. 10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서울역사박물관 수장고 재배치공사

통신공사 설계 변경 보고

서울역사박물관 수장고 재배치 통신공사 현장여건에 따른 변경사항 및 주관부서 요구사항으로 변경내용을 보고하고 설계변경 조치하여 수장고 재배치 통신공사에  만전을 기하고자 함

1		공사 개요 및 추진경위

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역사박물관 수장고 재배치 통신 공사

○ 공사기간 : 2019.6.24.~ 10.31

○ 도 급 자 : ㈜ 신우콤

○ 공사금액 : 금 119,065,500

○ 현재공정률 : 약 95%

□ 추진경위

○ 서울역사박물관 수장고재배치 공사 방침수립 : 2019.5.14

○ 재무과 수장고 재배치 통신공사 발주의뢰 : 2019.6.3.

○ 공사계약 체결 : 2019.6.18

작 성 자	경영지원부장 임원빈 ☎ 02-724-0105 과장 박관현 ☎ 0130 담당 : 이태준 ☎ 0132

2		실정보고 내용

□ 주용 변경내용

○ 전화 및 LAN 설비공사

-  유물정리실내 시스템 박스 모듈추가 - 주관부서 요구(유물관리과) : 유물정리실내 수장고 사무실 앞쪽에 시스템 박스용 모듈러 2개소 추가 설치

-  유물관리실 출입구 출입통제용 BOX 설치 – 주관부서 요구(유물관리과)

: 유물정리실 출입문 입구에 출입통제용 배관배선(UTP 4P) 및 전시실 출입문

UTP 1회선 설치

-  광케이블 신설 – 광케이블 MM 8C 1회선  통신장비실에서 수장고 사무실

IDF RACK까지 신설

○ 방송설비 공사 ; 변경 없음

○ CCTV 설비공사 : 변경없음

○ 통합배선 설비공사 : 변경없음

○ RFID 설비공사  : 변경없음

○ 동체감지 설비공사  : 신설공종

- 기존동체 감지기 철거 및 재설치

. 기존설치 되어진 14개소의 동체감지기를 철거하고 위치 재배치를 통하여 14개소 재설치

3		설계변경 내용

□ 설계 변경 금액

구 분	계약 금액	변경 금액	증·감
도급공사비	119,065,500	127,887,500	증 8,822,000

※ 공사 기간  변경 없음.

□ 수장고 재배치 통신공사 세부 변경 금액

※  별첨 : 변경 내역서 참조

4		검토 의견

○ 공사 도중  주관부서(유뮬관리과) 요구사항 및 기존 동체감지기 철거

및 재설치 등 추가공정 발생 등으로발생인한 수장고 재배치 통신공사

물량 변경이 발생하여 설계변경 처리하고자 함

5		향후 계획

□ 공사 완료 및 준공

붙임 : 1. 설계변경 요청 공문(변경 내역서 포함) 1부. 끝.