＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역 2차)

1. 시설과-10647(2019.10.23.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역 2차』과 관련하여 설계변경에 따른 변경계약을 붙임과 같이 의뢰합니다.

1. 용 역 명 : 국사봉배수지 건설공사 혼합건설폐기물 처리용역 2차

2. 계 약 자 : ㈜수도환경  대표 김창순

3. 용역기간 : 총차분 2018.11. 5. ~ 2019.10.25.(2차분 2019. 1. 1. ~ 2019.10.25.)

4. 계약금액 : 총차분 24,890,500원(3차분 23,234,670원)

5. 설계변경 내역                                                      (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총차분 용역비	24,890,500	27,314,830	(증) 2,424,330
2차분 용역비	23,234,670	25,659,000	(증) 2,424,330

6. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(시설비)

[세부사업명 : 국사봉배수지 건설공사(21103000)]

7. 변경사유 : 혼합건설폐기물 계약물량 증·감 발생

붙 임 : 1. 방침서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 설계변경내역서 및 관계서류 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	정성오		시설과장	10/24 송병욱
협조자
시행	시설과-10729	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1496	/전송	3146-1529	/	somc0855@seoul.go.kr	/	부분공개(6)