＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(국사봉배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역)

1. 시설과-10648(2019.10.23.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『국사봉배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역』과 관련하여 설계변경에 따른 변경계약을 아래와 같이 의뢰합니다.

1. 용 역 명 : 국사봉배수지 건설공사 건설폐기물 처리용역

2. 계 약 자 : ㈜강북공영  대표 안동인

3. 용역기간 : 총차분 2017. 4.27. ~ 2019.10.25.(3차분 2019. 1. 1. ~ 2019.10.25.)

4. 계약금액 : 총차분 86,840,000원(3차분 14,696,000원)

5. 설계변경 내역                                                      (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총차분 용역비	86,840,000	140,544,000	(증) 53,704,000
3차분 용역비	14,696,000	68,400,000	(증) 53,704,000

6. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비(시설비)

[세부사업명 : 국사봉배수지 건설공사(21103000)]

7. 변경사유 : 건설폐기물 계약물량 증·감 발생

붙 임 : 1. 방침서 1부.

2. 합의서 1부.

3. 설계변경내역서 및 관련서류 각 1부.  끝.

	시설과장
주무관	정성오		시설과장	10/24 송병욱
협조자
시행	시설과-10700	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1496	/전송	3146-1529	/	somc0855@seoul.go.kr	/	부분공개(6)