문서번호	기반시설과-3506
결재일자	2019.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기반시설과장	시설부장
양정훈		라철흠	10/24 전영주
협 조
	총무과장			한정훈
	기획예산과장			문영일
	주무관			김경화

서강대교 북단 외 2개소 승강기 실시설계 용역 준공기한 연기 및 설계변경 시행

2019. 10.

시   설   부

(기반시설과)

『서강대교 북단 외 2개소 승강기 실시설계 용역』

준공기한 연기 및 설계변경 시행

서강대교 북단 외 2개소 승강기 실시설계 용역의 기한연장 및 설계변경 시행 계획에 대하여 보고 드림

1		용역개요

○ 용 역 명 : 서강대교북단 외 2개소 승강기 설치 실시설계 용역

○ 용역기간 : 2019. 3. 18. ~ 2019. 11. 12.

○ 계약금액 : 119,603천원

○ 계약상대자 : ㈜서우티이씨 대표 강대신

○ 용역규모

- 승강기 및 비상계단 신설 각 3개소

2		보고내용

□ 준공기한 연기 검토

○ 준공기한 연기 사유

- 서강대교 북단 승강기 설치 위치의 지장물 조사 결과 과다한 지장물로 인하여 설치위치 변경에 따른 추가 지장물조사 및 측량, 관계기관 협의 등으로 지연

- 양화대교 북단 설치 지점의 지반조사를 위한 시추작업 중 미확인 콘크리트 층이 발견되어 지장물 확인을 위한 줄파기 작업으로 지연

○ 준공기한 연기 내역

용 역 명	당 초	변 경	비 고
서강대교 북단 외 2개소 승강기 설치 실시설계 용역	2019. 11. 12	2019. 12. 27 (45일 연기)	지체상금 부과 없음

○ 귀책소재 : 한강사업본부

□ 설계변경 시행

○ 관련근거 : 서강대교 북단 외 2개소 승강기 실시설계 용역 현안사항 실정보고(기반시설과-3209, ‘19.10.4)

○ 변경사유 : 기 실정보고 사항에 대한 용역비 반영

- 양화대교 북단 기계줄파기 3개소 시행(면적 31.5㎡, 체적 69,0㎥)

○ 변경내용

- 지장물 조사 내역

· 3개소 각 지점 폭 1.5m, 연장 7.0m, 깊이 2.2m

- 용역비 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ‧ 감	비 고
공 급 가 액	106,710,000	111,210,000	4,500,000
부가가치세	10,671,000	11,121,000	450,000
자 문 비	1,500,000	1,500,000	-
손해배상공제	722,000	722,000	-
도 급 비	119,603,000	124,553,000	4,950,000

○ 소요예산 : 4,950,000원

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 접근시설 유지관리, 시설비(한강교량 한강공원 연결 승강기 설치)

○ 검토의견

- 승강기 설치 위치에 발견된 미상의 지하구조물 확인에 따른 추가 조사비용을 반영하여 설계변경 시행함이 타당하다고 판단 됨

3		조치계획

○ 위 보고내용과 같이 준공기한 연기 및 설계변경을 시행하고자 함

붙임  1. 용역사 공문서  1부

2. 준공기한 연기원 1부

3. 준공기한 연기사유 1부

4. 지반조사 결과보고 1부

5. 설계변경 내역서 1부

6. 실정보고서 1부.  끝.