투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	신림공영차고지(저류조포함) 조성공사 설계변경(제1차 2회) 계약 의뢰

1. 토목부-19213(2019.10.23.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 『신림공영차고지(저류조포함) 조성공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조포함) 조성공사

2. 공 사 비 : 22,918백만원(제1차 : 4,870백만원)

3. 공사기간 : ‘18. 10. 01.∼‘21. 09. 29.(1차 : ’18.10.01. ~ ‘19. 10. 31.)

4. 시 공 사 : ㈜삼영종합건설(주) 외 2개사

5. 예산과목 :

- 광역교통시설특별회계, 주차장 확충 및 관리, 공영차고지 신규 확충, 신림공영차고지 건설, 시설비(감2,800백만원)

- 일반회계, 치수 및 하천 관리, 수방대책 사업, 신림공영차고지 빗물저류조 설치, 시설비

6. 설계변경 현황

(금액 단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비고
제1차 2회	****	*********	*********	**********
	****	*********************	*********************	*******

7. 설계변경 사유

- 현장 여건변동(지장물 처리, 매장문화재 조사 등)으로 추가 공사기간 반영 및 도급비 감

※ 귀책사유 : 서울특별시

붙 임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 건설사업관리기술자 검토보고서 1부.

3. 설계변경 내역서(제1차 2회) 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이상근		터널건설과장	여용석		토목부장	10/24 김용제
협조자
시행	토목부-19298	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2566	/전송	3708-2599	/	lee66sg@seoul.go.kr	/	부분공개(6)