투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경(최종) 시행 및 변경계약 의뢰[2019년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)]

1. 기반시설과-3486호(2019.10.22.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행하고 변경 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2019년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

나. 계약기간 : 2019. 3. 27. ~ 2019. 11. 30.

다. 계약금액 : 금304,068,000원

라. 도 급 자 : ㈜민정건설 대표 백승언

바. 변경내용 : 신규공종 추가 및 물량 증·감으로 인한 계약금액 변경

구 분		당 초	변 경	증·감		비 고
총 공 사 비		305,148,000	349,400,000	증)	44,252,000
도급비	공 급 가 액	276,425,455	317,636,364	증)	41,210,909
	부가가치세	27,642,545	31,763,636	증)	4,121,091
	계	304,068,000	349,400,000	증)	45,332,000
이 전 비		1,080,000	-	감)	1,080,000

사. 변경사유 : 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 증·감 사항 반영

아. 예산과목

- 한강공원관리및운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원접근시설유지관리, 시설비

- 한강공원관리및운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원기전시설유지관리, 시설비

※ 낙찰차액 사용 (방침 기반시설과-2611호, 2019. 8. 23.)

붙 임  1. 설계변경 시행 보고서 1부

2. 변경내역서 1부

3. 설계도면(설계변경) 1부

4. 총괄수량집계표 1부.  끝.

	시설부장
주무관	나병윤		주무관	임영준		기반시설과장	라철흠		시설부장	10/24 전영주
협조자	주무관	김경화		기획예산과장	문영일		총무과장	한정훈
시행	기반시설과-3504	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개