＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신	(주)영이엔앨
(경유)
제목	공정변경 작업지시(제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사)

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 정수센터와 귀사 간에 계약하여 시행 중인 『제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사』와 관련하여 아래와 같이 작업공정을 변경하오니 작업을 완료하고 설계변경에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 제2정수장 응집지 유입수문 수문권양기 전기공사

나. 계 약 자 : ㈜이엔앨 대표자 박영락

다. 작업기간 : 2019. 09. 11 ~ 2019. 11. 09

라. 작업위치 : 제2정수장 응집지

마. 변경내용

- 케이블 트레이 커버 설치

- 케이블 트레이와 수문간 배관 추가(1종금속제가요전선관)

- 8지 케이블트레이 설치위치 변경(1번∼2번 수문 사이로 설치)

끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		주무관	김희수		정수시설과장	10/25 代김희수
협조자
시행	정수시설과-11659	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	부분공개(5)