＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	국사봉 및 사당배수지 건설공사 감독권한대행 등 통합건설사업관리단
(경유)
제목	실정보고 승인 알림

1. 대한(국사관리단) 제2019-197(‘19.10.10.)호, 237(’19.10.18.)호, 246(‘19.10.23.)호 및 248(2019.10.24.)호와 관련입니다.

2. 「국사봉배수지 건설공사」와 관련하여 ‘배수지 성토사면 소단부 U형측구 추가 설치 실정보고’ 외 3건에 대하여 붙임과 같이 승인하오니, 향후 계약금액조정 등의 후속 절차를 이행하시기 바랍니다.

붙 임 : 보고서 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	정성오		시설과장	10/25 송병욱
협조자
시행	시설과-10784	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1496	/전송	3146-1529	/	somc0855@seoul.go.kr	/	부분공개(6)