투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약 (슬러지건조시설 예비품 보관창고 증축공사)

1. 관리과-12360(2019.10.25.)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 시행중인 『슬러지건조시설 예비품 보관창고 증축공사』에 대하여 시공물량 변경 등 계약변경사항이 발생되어 아래와 같이 설계변경 시행 및 계약하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 슬러지건조시설 예비품 보관창고 증축공사

나. 계 약 자 : (주)거현산업

다. 계약기간 :  2019. 9. 2.∼ 2019. 11. 15

라. 설계변경내역                                          (단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	증 · 감	비고
계약금액	113,236,000	115,310,000	(증) 2,074,000

마. 예산과목 : 오니처리유지보수, 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 합의각서 1부.

3. 설계변경 서류 1부.  끝.

주무관	양희원		주무관	조연상		관리과장	10/25 김광석
협조자
시행	관리과-12366	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화		/전송		/		/	부분공개(6)