문서번호	설비부-16618
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	10/25 임정규
협조

『율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 전기공사』

물가변동(제1회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

2019. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선 전기공사』

물가변동(제1회)으로 인한 계약금액 조정 검토보고

『율곡로 창경궁앞 도로구조개선 전기공사』계약상대자로부터 물가변동 (ESC1회)으로 인한 계약금액 조정이 있기에 물가변동 금액 적정 여부를 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선 전기공사

□  공사기간 : 2014.05.15. ~ 2019.12.31

□  위    치 : 종로구 창덕궁 돈화문 ~ 원남동 사거리(연장810m)

□  규    모 : 도로확장 4차로→6차로, 지하차도 320m

□  시 공 사 : *********

□ 공사금액 : ***********************************

□ 공 정 률 : 75%(전기)

2		관련근거

□ 지방계약법 시행령 제73조(물가변동으로 인한 계약금액 조정)

□ 율곡감 제2019-270호(`19.10.16): 건설사업관리단 물가변동 검토보고

3		계약금액 조정 내용

□  물가변동으로 인한 계약금액 조정 충족 요건(아래 ①, ② 동시 충족)

① 계약체결일로부터 90일 이상 경과

② 물가변동 지수조정률이 100분의 3이상 증감된 경우

□  계약금액 조정 검토 내용

○ 물가변동 충족조건 검토

기준시점 (계약 체결일)	비교시점 (조정 기준일)	경과일수	지수 조정률	검토결과
*********	*********	****	*****	**

○ 계약금액 조정 세부검토 내용

구 분		검토내용	비 고
계약금액(A)		**************
물가변동 제외금액(B)		************
물가변동 조정기준일 공정률	예정공정률	******
	실행공정률	******
	제외공정률	******
물가변동 적용대가(C)		************	C=A-B
물가변동 조정률(D)		*****	지수조정률 산출표 참조
물가변동 등락대상 조정금액(E)		***********	E=C*D
선급금 공제금액(F)		**	선금지급 없음
물가변동 적용금액		***********	천단위 절사

□  물가변동으로 인한 계약금액 조정내용

구분	당초	변경후	증감액
총차	**************	**************	*************
4차	************	************	*************

4		보고자 의견

□ 계약상대자가 신청한 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청내용에        대한 책임 건설사업관리자의 검토 보고가 적합하다고 판단되므로,        계약부서에 계약변경 의뢰하고자 함.