문서번호	토목부-19388
결재일자	2019.10.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상근		여용석	10/25 김용제
협조

- 신림공영차고지(저류조포함) 건설공사 -

건설사업관리용역 2차분 감리비 검토 보고

2019. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사 -

건설사업관리용역 2차분 감리비 검토 보고

『신림공영차고지(저류조 포함) 건설공사』건설사업관리용역을 시행하고 있으나 2차분 감리비가 부족하여 확보하고자 검토 보고드림

Ⅰ				용역개요

○ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2 일원

○ 규    모 : 공영주차장 및 빗물저류조 조성

- 주차장 : 버스 101대(지상 1층, 지하 1층), 관리동 및 부속시설

- 저류조 : 빗물저류조 1개소(면적 7,000㎡, 저류용량 35,000㎥)

○ 용역기간 : '18. 04. 02 ~ '20. 08. 01.(2차 : ‘19. 07. 27. ~ ‘19. 12. 31.)

○ 용 역 비 : 2,047,960천원(2차 : 164,010천원)

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 외 2개사

【조 감 도】

Ⅱ				추진경위

○ 2018. 02. 12 : 건설사업관리용역 계약 체결

○ 2018. 04. 02 : 건설사업관리용역(1차) 착수

○ 2018. 10. 01 : 책임건설사업관리기술자 투입

○ 2019. 07. 26 : 건설사업관리용역(1차) 준공

○ 2019. 07. 27 : 건설사업관리용역(2차) 착공

○ 2019. 09. 30 : 기본 및 실시설계용역 준공

Ⅲ				사업 진행사항

추 진 사 항	현 장 사 진
○ ‘19.01.23.~’19.06.23 : 사업부지내 무단점유자 이전을 위한 8회 회의 실시 및 자진 이전 설득
○ ‘19. 6. 30. : 사업부지내 건설용 강재 및 판넬 이전 완료

○ ‘19. 8. 30. : 사업부지내 수목제거(95주) 및 수목이식(16주) 실시
○ ‘19. 9. ~ 10. : 매장문화재 지표조사 및 표본조사 실시
○ ‘19. 9. : 현장내 폐기물 정리등
○ ‘19. 1. ~ 9. : 실시설계 도서 검토

Ⅳ				감리비 현황

○ 연차별 감리비 현황

구 분	2018	2019	비 고
용 역 비	200백만원	100백만원
용역기간	‘18.10.01. ~ ’19.07.26.	‘19.07.27.~’19.12.31.

○ 문제점

- 당초 사업부지내 무단점유물(건설용 강재 및 판넬, 화원 등)이 이전이 되지않아 감리단장 1인만 투입하여 공사 관리를 하였으나 무단점유물 일부(건설용 강재 및 판넬) 이전 되었고, 현재 설계용역 및 매장문화재 조사가 완료되어 공사 실착공이 시행되어야 하나, 감리비 부족으로 감리투입이 지연되어 원활한 공사추진이 곤란.

Ⅴ				감리비 확보 계획

○ 통계목 조정을 통한 감리비 확보(시설비⇒감리비)

【금액단위 : 천원】

예산과목			2019년 예산내역		증 · 감	비고
예산과목	세부사업	통계목	당초	변경
*********** *************************************	************	*** ********	***********	***********	*************
		*** ********	***********	***********	*************
		*	*************	*************	*

○ 건설사업관리기술자 배치계획

현장명	등 급 (직급)	분 야	2019년도													개월	비고
			7		8		9		10			11		12
신림공영차고지 건설공사	특급기술자	토목														6.05	7.27 ~12.31.
	고급기술자	토목														2.12	8.28 ~12.31.

Ⅵ				조치의견

○‘19. 11.부터 본격적인 공사가 시행되는 바, 감리원을 추가 투입하여 공사 추진에 만전을 기하고자 하며,

○ 감리비 확보를 위하여 사업주관 부서인 주차계획과에 통계목 조정 요청