“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비 공사 기간연장 알림

1. 한양도성도감-9171(2019.09.05.)호 관련입니다.

2. 서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비 공사의 사업기간 연장을 다음과 같이 알려드리니 공사가 원만히 진행될 수 있도록 많은 협조 바랍니다.

가. 사 업 명 : 서울 DDP내 한양도성 성벽 보수정비공사

나. 위    치 : 서울특별시 중구 을지로 7가

다. 사업기간

- 당   초 : 2019. 7. 4.(목) ~ 11. 4.(월)

- 변   경 : 2019. 7. 4.(목) ~ 12. 4.(수)(30일 연장)

※ 연장사유 : DDP내 한양도성 성벽 보수정비 공사 진행 중 태풍의 영향으로 공사 중지 기간이 30일 이며, 현장 여건에 따른 설계변경 검토에 시일이 소요되어 과업기간을 연장

라. 시공업체 : ㈜재우씨엔씨

마. 공사 범위 및 내용 : DDP내 한양도성 성벽(총 265m) 상부마감 정비 공사

붙임  1. 예정 공정표 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울역사박물관장(한양도성연구소장),재단법인서울디자인재단 대표이사
★주무관	구선이		도성보존팀장	代박근우		한양도성도감과장	10/25 代김종필
협조자
시행	한양도성도감-11016	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	대시민공개