문서번호	서울숲공원지원과-2149
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	서울숲관리팀장	서울숲공원지원과장	동부공원녹지사업소장
이정호	강명환	송복식	10/28 최현실
협 조
	재무팀장		곽선아

「서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업」

설계변경 검토 보고

2019. 10.

동부공원녹지사업소

(서울숲공원지원과)

「서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업」

설계변경 검토 보고

서울숲공원지원과에서 추진 중인「서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업」과 관련하여 공사감독기관에서 설계변경요청을 하였기에 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업

○ 공사기간 : 2019.08.01.~11.02

○ 도 급 비 : 241,659,000원

○ 도 급 자 : 옥포건설(주) 대표: 김수곤

○ 공사내용 : 퇴적물 준설 및 수질정화시스템 설치 등

□ 설계변경내용

○ 수요기관 검토요청사항 : 공사감독3처-9889(2019.10.24.)

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
철 거 공 사	◼ 작업지시에 따른 신규내역추가 ▸전기공사 : 0 → 1식 ▸가림 막 휀스 (H1800x2000): 0 → 30경간 ▸가두리 제작설치(6000x6000x1800): 0 → 1식	※ 기검토사항 [서울숲공원지원과-2108호(2019.10.22.)]
조 경 공 사	◼ 작업지시에 따른 신규내역추가 ▸생태보 설치 : 0 → 1식(4종)
연 출 시스템공 사	◼ 작업지시사항 및 현장여건에 맞게 물량조정 ▸역쇄배관(150A) : 175→ 187m ▸용접접합(150A) : 62→ 78개소 ▸버터플라이밸브(150A) : 8→ 12EA ▸스테인리스볼트(M16×130mm) : 96→ 128EA ▸스테인리스너트(16mm) : 256→ 288EA ▸PUMP 기계실 규격변경 1식 : 3800*1500*1000→ 3800*2500*1000 ▸STS컨트롤 슬라이드 제작 : 0→ 4EA ▸주춧돌 수량추가 : 20→ 24EA ▸스테인레스강관(80A) 0→ 90m ▸엘보우(80A) 0→ 10EA ▸캡(80A) 0→ 2EA ▸캐노피(50mm) 0→ 4EA ▸스테인레스 볼밸브(50A) 0→ 4EA ▸버터플라이밸브(80A) 0→ 2EA ▸용접접합(80A) 0→ 33개소 ▸용접접합(50A) 0→ 4개소 ▸샤프노즐(25A) 53→ 20EA ▸단니플(25A) 53→ 20EA ▸용접접합(25A) 53→ 20개소 ▸배관토공 0→ 22m ▸플렌지(80A) 0→ 4EA ▸스테인레스강관(50A) 0→ 4m ▸티(80A) 0→ 2EA ▸모터보호장치(EOCR) : 0 → 4EA

□ 예산내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	219,690,000	241,545,455	21,855,455
	부가세	21,969,000	24,154,545	2,185,545
	도급비계	241,659,000	265,700,000	24,041,000
총 공 사 비		241,659,000	265,700,000	24,041,000

□ 예산집행 내역

(단위 : 천원)

총예산 (A)	구분	설계 용역비	공사비		집행잔액 (A-B)	집행잔액 +낙찰차액 (A-B-C)
			도급비	폐기물 처리비
350,000	발주금액 (B)	15,000	276,134	26,200	32,666	70,855
	계약금액	14,250	241,659	23,236
	낙찰차액 (C)	750	34,475	2,964

‣ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 응봉공원 시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 검토의견

○ 상기 검토보고 내용과 같이 설계변경 시행코자 함.

○ 예산 조치사항

- 공사비 증액분(24,041천원)은 사업비 잔액을 활용하여 예산집행

- 계약담당부서에 설계변경 시행 의뢰(공원운영과)

붙  임  1. 설계변경 요청공문 및 변경설계서 각 1부

2. 설계정산 보고 및 설계변경 내역서 각 1부

3. 제비율 검증확인서 및 실정보고서 각 1부.  끝.