＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 회신

1. 공사감독2처-16078호(2019.10.24.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 위탁감독중인 『************************************』의     실정보고에 대한 검토 결과를 아래와 같이 회신하오니 공사 감독업무에 철저를 기하여 주시기    바랍니다.

가. 에어탑 설치건에 대하여 귀 공단의 의견이 타당하게 검토되어 승인 통보하오니, 추후 설계

변경시 반영 조치.

나. 1,2구간 아스콘 포장 두께 증가건에 대하여 귀 공단의 의견이 타당하게 검토되어 승인 통보하

오니, 추후 설계변경시 반영 조치.

다. S-gate 설치건에 대하여 귀 공단의 의견이 타당하게 검토되어 승인 통보하오니, 추후 설계

변경시 반영 조치.

라. 3구간 관구경변경건에 대하여 귀 공단의 의견이 타당하게 검토되어 승인, 개략공사비 증가는

추가실정보고를 요청.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	강영탁		주무관	최용진		급수운영과장	10/28 유승효
협조자
시행	급수운영과-21913	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 북부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3358	/전송	02-3146-3389	/	kyt0362@seoul.go.kr	/	부분공개(5)