＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(예술의전당교차로~우면삼거리간)

우리사업소에서 시행하여 서울시설공단에 공사감독 위탁중인 『************************』에 대하여 설계변경 심의를 완료하고 아래와 같이 설계변경 시행 하고자 합니다.

가. 공 사 명: *************************

나. 공사개요: 당초 D=150~700㎜, L=729m

변경 D=200~700㎜, L=710m(감 19m)

다. 설계변경사유:공종별 계약물량 증·감 및 신규공종 발생

라. 계 약 자: **************************

마. 계약기간: 2019. 5. 7. ~ 2019. 11. 2.

바. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

노후 상수도관(송배수관) 정비 - 41101

사. 하자기간: 준공검사일로부터 3년

아. 변경금액                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총공사비	2,701,972,380	2,682,000,000	감 19,972,380
도 급 비	1,859,972,380	1,840,000,000	감 19,972,380
관 급 비	450,000,000	450,000,000	-
복구비및기타	392,000,000	392,000,000	-

붙임  1. 설계변경 심의 의견서 1부.

2. 설계변경 관련서류 각 1부.

3. 합의서 1부.  끝.                                   감추산  2019.10.28.

주무관	강희창		주무관	서은영		시설관리과장	代전동근		강남수도사업소장	10/28 조세연
협조자	주무관	제영도		행정지원과장	이진우
시행	시설관리과-22705	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)459-4	/
전화	02-3146-4905	/전송	02-3146-4939	/	jin2ju@seoul.go.kr	/	부분공개(6)