문서번호	역사도심재생과-11668
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		도심계획팀장	역사도심재생과장
조장희		배성호	10/28 조남준
협조

설계변경(최종) 검토 보고

- 정동지역 한양도성 순성길 연결공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

도시재생실

역사도심재생과

설계변경(최종) 검토 보고

- 정동지역 한양도성 순성길 연결공사 -

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 정동지역 한양도성 순성길 연결공사

○ 공사기간 : ‘18. 12. ~ ‘19. 10.

○ 공사내용 : 정동지역 순성길 멸실구간(돈의문터~소의문터) 연결 (750m)

○ 시 공 사 : (주)서정 대표 김윤기

○ 공사감독 : 서울시설공단***************

○ 도 급 비 : 522,155,480원

□ 추진경위

*************************************

***********************************

○ ‘18. 12. 20.  공사 착공

○ ‘19. 10. 28.  변경설계서 제출(서울시설공단)

□ 설계변경(안) ***************

구 분		금 액(원)			비고
		당 초	변 경	증 감
총 공 사 비		522,155,480	632,620,000	110,464,520
도급액	공 급 가 액	474,686,800	575,109,091	100,422,291
	부가가치세	47,468,680	57,510,909	10,042,229
	계	522,155,480	632,620,000	110,464,520

*************************

***********************************************

****************************

**************************

***********************************

***************************

*************************************

******

**********************************************************************************

******************************************************************************************

붙임  1. 관련공문 및 설계(변경)내역서 등 첨부서류 각 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.