투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	「서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업」 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

1. 서울숲공원지원과-2149(2019.10.28.)호와 관련입니다.

2. 서울숲공원지원과에서 추진 중인『서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업』에 대하여 아래와 같이 설계변경 하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업

나. 공사기간 : 2019.08.01.~11.02.

다. 도 급 비 : 241,659,000원

라. 도 급 자 : 옥포건설(주) 대표: 김수곤

마. 공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		공 사 비(원)		증 감	비 고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	***********	***********	**********
	부가세	**********	**********	*********
	도급비계	***********	***********	***********
총 공 사 비		***********	***********	***********

※ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 응봉공원 시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임 : 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서. 1부 끝.

	서울숲공원지원과장
주무관	이정호		서울숲관리팀장	강명환		서울숲공원지원과장	10/28 송복식
협조자
시행	서울숲공원지원과-2152	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2983	/전송	02-460-2989	/	alrai@seoul.go.kr	/	부분공개(5)