문서번호	거점성장추진단-4483
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		애니타운팀장	산업거점활성화반장
임형준		김인호	10/28 정덕영
협조

서울애니메이션센터 재건축 사업

소규모 지하안전영향평가 용역 완료보고

2019.10.

경 제 정 책 실

(거점성장추진단)

서울애니메이션센터 재건축 사업

소규모 지하안전영향평가 용역 완료보고

서울애니메이션센터 재건축 사업 관련「지하안전관리에 관한 특별법」에 따른 소규모 지하안전영향평가 용역을 시행하고 그 결과를 보고드림

□ 시행근거

○「지하안전관리에 관한 특별법」제23조(소규모 지하안전영향평가의 실시 등)

○ 소규모 지하안전영향평가 용역 시행계획(문화융합경제과/’18.4.11.)

□ 용역 개요

*******************************************

*******************************

**********************************************

***************************************

*******************************

○ 주요 과업내용

- 지하수 변화에 의한 영향 및 지반안전성 검토

- 지하안전 확보방안 수립 등 지하안전영향평가서 작성

- 지하안전영향평가 협의에 필요한 사항 등

□ 용역 결과

○ 주요 추진경위

- ’18.7.2.	용역 착수

- ’18.11.26.	용역 부분준공(지하안전영향평가서 작성을 위한 지반조사 부문)

- ’18.12.12.	지하안전영향평가서 검토요청(市→중구 건축과)

- ’19.7.8.	소규모 지하안전영향평가서 보완제출(1차, 市→중구 건축과)

- ’19.9.30.	소규모 지하안전영향평가서 보완제출(2차, 市→중구 건축과)

- ’19.10.11.	소규모 지하안전영향평가서 협의 결과 통보(중구 건축과→市)

(협의의견 : “조건부 동의”)

- ’19.10.17.	소규모 지하안전영향평가서 협의 내용 반영결과 통보서 제출(市→중구 건축과)

- ’19.10.21.	용역 준공신고서 제출(계약자→市)

**********

***********************************

****************************************

*********

***********************************************************************************

***********************************************************************************************************

《지하안전영향평가 재협의 대상》

「지하안전관리에 관한 특별법 시행령」제20조제2항

1. 굴착깊이가 법 제15조 및 제16조에 따라 협의한 사업계획등에 반영된 깊이보다 3미터 이상 증가하는 경우

2. 굴착면적이 법 제15조 및 제16조에 따라 협의한 사업계획등에 반영된 면적보다 30퍼센트 이상 증가하는 경우

□ 향후계획

○ 용역 준공검사조서 작성 및 제출(재무과)	’19.10.

○ 용역 시행결과 통보 및 반영요청(도기본)	’19.10.

※ 따로붙임 : 용역 준공신고서 및 성과품 사진 등 각 1부.  끝.