문서번호	급수운영과-25905
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
김선찬	이상환	송근호		10/28 代서재식
협 조

『2018년 광진구 상수도공사 건설폐기물처리용역』

발주 검토 보고

2019. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2018년 광진구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역』

발주 검토 보고서

2018년 광진구 상수도공사 건설폐기물 처리용역의 계약 물량이  소진되어 추가 발주를 검토하고 보고드림.

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 2018년 광진구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)

○ 계 약 자 : **************

○ 계약금액 :************

○ 용역기간 : 2019. 02. 19.~2019. 11. 29.

○ 용역개요 : 폐기물 운반량 573[eqn: m ^{3}], 폐기물 처리량 1,327톤

□ 보고내용

○ 건설폐기물 처리물량 소진으로 인한 추가 발주가 필요한 실정임.

- 건설폐기물 처리 현황

(단위: ton)

구 분	당 초	변 경	증·감
계	1,327	1,748	증) 421
폐 아스콘	881	939	58
폐콘크리트	428	809	381
폐 토사	18	-	18

※ 2019년 광진구 관내 상수도공사 노후 배급수관정비공사(물량 증가) : 421 ton

□ 조치의견

○ 위의 보고내용과 같이 급수공사 폐기물량 증가(421ton)로 인한 계약물량이 소진됨에 따라,

○ 원활한 건설폐기물 처리를 위해 폐기물 처리 용역을 추가로 발주하여 관련 공사시행에 만전을 기함이 가하다고 판단됨.

- 용역현황(추가 발주)

· 용 역 명: 2019년 광진구 관내 상수도공사 건설폐기물처리용역
· 용역개요: 폐기물 운반량 612[eqn: m ^{3}], 폐기물 처리량 1,428톤
· 용역기간: 계약일 ~ 2019. 12. 31.
· 용역금액: *************

※ 추정금액이 50,000천원 미만으로 우리 사업소 행정지원과에 계약의뢰

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.