“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

정동 역사재생활성화사업의 일환으로 추진중인 「정동지역 한양도성 순성길 연결공사」와 관련하여 다음과 같이 설계변경(최종)하고 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 정동지역 한양도성 순성길 연결공사

나. 공사기간 : 2018.12.20.~2019.10.31.

다. 시 공 사 : (주)서정 대표 김윤기

라. 도 급 비 : 522,155,480원 → 632,620,000원 (증 110,464,520원)

마. 예산과목 : 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 도심 역사문화자원 관리, 정동 역사재생사업, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계(변경)내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

							역사도심재생과장
주무관							조장희			도심계획팀장					배성호					역사도심재생과장					10/28 조남준
협조자				계약1팀장						조현
시행			역사도심재생과-11680									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청 11층 역사도심재생과 (태평로1가)															/
전화		02-2133-8496						/전송			02-2133-0742					/	cjh8041@seoul.go.kr												/	부분공개(5,6)