문서번호	정수시설과-11700
결재일자	2019.10.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	10/28 유성종
협조
	주무관		김희수

『제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사 감리용역』

감리원 배치기간 연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『제2정수장(송수동) 고압인입케이블 교체 전기공사 감리용역』

감리원 배치기간 연장 검토 보고

우리 정수센터에서 시행하고 있는 「제2송수동 고압인입케이블 교체 전기공사」 준공기한 연장에 따른 감리원 배치기간 연장을 검토하고 보고 드림.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 제2송수동 고압인입케이블 교체 전기공사 감리용역

○ *************************************

○ ********************************

○ ************************************

○ 감 리 사 : ㈜극동문화 전기설계 대표자 김경용***********

2		관련 근거 및 규정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(행정안전부 예규 제21호, 18.01.10.)

제14장 용역계약 일반조건, 제6절 과업내용의 변경과 계약금액 조정, 2 계약기간의 연장

○ 전력기술관리법 운영요령(산업통상자원부 고시 제2017-21호, 17.02.09.)

제15조(대가 등의 조정) 3 해당 공사기간의 변경으로 공사감리기간이 연장된 경우

3		보고내용

○ 감리원 배치 현황

구 분	성 명	등급	용 역 기 간	배치일수
상주(시공)감리원	*******	고급	2019.07.03. ~ 2019.10.30.	73일
비상주(기술지원)감리원	*****	특급	2019.07.03. ~ 2019.10.30.	81일

당해 전기공사 공정율 : 75%(준공기한 : 2019.11.24.)

○ 감리용역 기간 연장 : ******************

*******************************************************

소요예산 : 변경없음

변경내용

구 분	당 초	변 경	증․감
*******	*************************	*************************	****
*******	************	************	*

○ 감리원 배치기간 연장

*******************

**********************************************

감리원 변경배치 내용

******************				******							****
				*	**	**	**	***	***	**
**	****	**	***	***	**	**	**	**	*	*	*
			***	***	*	**	**	**	**
***	****	**	***	***	**	**	**	**	*	**	****
			***	***	**	**	**	**	**

○ 보고자 의견

해당 전기공사 기간연장으로 감리용역 기간연장이 불가피하며 전기감리원 실투입 일수를 고려하여 ***************************************

4		조치계획

○ 상기 검토내용이 지방계약법 등 관련규정에 적합하여 당해 용역에 대한 변경계약을 시행하여 해당 전기공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임   합의각서 1부.   끝.