투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	서강대교 북단 외 2개소 승강기 설치 용역 준공기한 연기 및 설계변경에 따른 계약의뢰

1. 시설부장 방침(기반시설과-3506)과 관련됩니다.

2. 「서강대교 외 2개소 승강기 설치 실시설계 용역」에 대한 준공기한 연기 및 설계변경에 따른 계약을 의뢰합니다.

가. 준공기한 연기 : 당초 ′19.11.12. → 변경 ′19.12.27.(45일 연기)

나. 설계변경 계약 : 당초 119,603,000원 → 변경 124,553,000원 (증 4,950,000원)

붙임  1. 준공기한 연기원 1부

2. 공동수급표준협정서 1부

3. 동의서 1부

4. 설계변경 내역서 1부

5. 방침서 1부.  끝.

	기반시설과장
주무관	양정훈		기반시설과장	10/28 라철흠
협조자
시행	기반시설과-3513	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화	3780-0677	/전송	02-3780-0744	/	seed22@seoul.go.kr	/	부분공개(5)