투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사)

우리 부에서 시행 중인「고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사

나. 위    치 : 강동구 강일동 599일원

다. 공사규모

- 교량확장 1개소(4차로→6차로), 보도교 설치 2개소, 연결보도 L=200m 신설

라. 계 약 자 : 임원개발(주)외 1개사

마. 계약금액 : 총차 – 금1,066,543,000원(금일십억육천육백오십사만삼천원)

1차 - 금1,000,000,000원(금일십억원)

바. 기간변경 내역

구 분	당 초	변경	증·감	비고
전체	******************* ******	******************** ******	*******	** ****
1차	******************** ******	******************** ******	*******	** ****

사. 귀책소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책소재 : 도급계약자 귀책사유 없음

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 공사착공 후 현장 내 지하지장물이 기존 설계와 상이하여 교대기초 위치변경 검토 및 설계(공법) 재검토로 인한 공기지연으로 현 준공기한 내 사업완수 불가

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토보고서(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 시공사 관련서류 1부.

4. 합의각서 1부.

5. 공기연장 관련 방침서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	김재건		광역도로과장	박일연		토목부장	10/29 代이동훈
협조자
시행	토목부-19603	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 한강사업본부 1층 시설부 기반시설과 (성수동1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3780-0677	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)