문서번호	도시철도사업부-10699
결재일자	2019.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		동북선2과장	도시철도사업부장
이병석		이용주	10/29 최병훈
협조
	주무관		김동일

『별내선(8호선연장) 2공구 건설공사 』

휴일 작업계획 승인 관련 검토보고(11월)

2019. 10.

도시철도사업부

『별내선(8호선연장) 2공구 건설공사』

휴일 작업계획 승인 관련 검토 보고(11월)

별내선(8호선연장) 2공구 건설공사 관련 11월 휴일 기간 중 작업계획 승인 요청에 대하여 검토 보고 드림

□ 휴일 작업승인 요청 내용

○ 근  거 : 별내선2 건사관 제2019-480호(2019.10.28.)

두산건설 제2019-7949호(2019.10.25.)

○ 작업일 : 총9일【 11.2(토)/11.3(일)/11.9(토)/11.10(일)/11.16(토)/11.17(일)/11.23(토)/11.24(일)/11.30(토)】

□ 휴일 작업계획

○ 관련근거

- 공사계약특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)

- 공사시방서 4.1.9(산업보건상의조치) 마.(근로시간 연장의 제한)

- 건설사업관리용역 과업내용서 6.3(휴일 및 야간근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

- 휴일작업 현장관리 개선방안 [도시철도토목부-10729호('13.11.15.)]

‣ 휴일근무 건설사업관리기술자 대가는 귀책사유에 따라 계약상대자가 지급

⇨ 검토의견 : 건설사업관리기술자의 휴일근무 대가는 서울특별시 공사계약

특수조건 제11조에 따라 계약상대자 부담

○ 휴일작업 사유

-  시점부(NATM) 터널구간과 수직구(환기구)구간 작업의 연속성 확보 및 원활한 공정 추진을 위해 지속적 공사추진과 공사관리를 위한 건설사업관리기술자 근무 필요

○ 휴일근무 적정성 및 비용부담

-  휴일작업 현장관리 개선방안 검토보고(도시철도 토목부-10681, ‘13.11.14.)

□ 휴일근무 대가는 귀책사유에 따라 지급 ⇒ 시공사 귀책은 시공사 대가 지급

-  건설사업관리 기술단 검토의견

□ 휴일작업 사유 : 시공사 귀책으로 인한 휴일근무 명기

○ 근로기준법 근로시간 준수여부(52시간) : 적정(대체근무 시행)

○ 휴일작업 현황 및 근무계획(시공사)

작업일	주야구분	위 치	주 요 작 업 내 용	현장 관리자
				건사단	시공사
11.02(토)	주간	NATM1구간	- 상반 굴착 및 지보 설치	*****	******** ********* ******* ******** ******** ********
		수직구1번	- 14단 굴착, 12단 R/B 시공
		NATM2구간	- TBM장비조립, STP설치
	야간	NATM1구간,수직구1번, NATM2구간	- 상반 굴착 및 보강, 수직구 굴착, TBM 조립 및 STP 설치	*****	********
11.03(일)	주간	NATM1구간	- 상반 굴착 및 지보 설치	*****	******** ******** ******** ********
		수직구1번	- 14단 굴착, 12단 R/B 시공
		NATM2구간	- TBM장비조립, STP설치
	야간	NATM1구간,수직구1번, NATM2구간	- 상반 굴착 및 보강, 수직구 굴착, TBM 조립 및 STP 설치	*****	********
11.09(토)	주간	NATM1구간	- 상반 굴착 및 지보 설치	*****	******** ******** ******** ******** ********
		수직구1번	- 14단 굴착, 13단 R/B 시공
	야간	NATM1구간,수직구1번	- 상반 굴착 및 보강, 수직구 굴착	*****	********
11.10(일)	주간	NATM1구간	- 상반 굴착 및 지보 설치	*****	******** ******** ******** ******** ********
		수직구1번	- 14단 굴착, 13단 R/B 시공
	야간	NATM1구간,수직구1번	- 상반 굴착 및 보강, 수직구 굴착	*****	********
11.16(토)	주간	NATM1구간	- 상반 굴착 및 지보 설치	*****	******** ******** ******** ********
		수직구1번	- 15단 굴착, 14단 R/B 시공
		NATM2구간	- TBM장비조립, STP설치
	야간	NATM1구간,수직구1번, NATM2구간	- 상반 굴착 및 보강, 수직구 굴착, TBM 조립 및 STP 설치	*****	********
11.17(일)	주간	NATM2구간	- TBM장비조립, STP설치	*****	********* ********** ******* ******** ********
	야간	NATM2구간	- TBM 조립 및 STP 설치	*****	********
11.23(토)	주간	NATM1구간	- 상반 굴착 및 지보 설치	*****	******* ******** ******** ********
		수직구1번	- 15단 굴착, 14단 R/B 시공
	야간	NATM1구간,수직구1번	- 상반 굴착 및 보강, 수직구 굴착	*****	*********
11.24(일)	주간	NATM1구간	- 상반 굴착 및 지보 설치	*****	******** ******** ******** ******** ********
		수직구1번	- 15단 굴착, 14단 R/B 시공
	야간	NATM1구간, 수직구1번	- 상반 굴착 및 보강, 수직구 굴착	*****	*********
11.30(일)	주간	NATM1구간	- 상반 굴착 및 지보 설치	*****	******** ********* ******** ******** ********
		수직구1번	- 15단 굴착, 14단 R/B 시공
		NATM2구간	- TBM장비조립, STP설치, 전기설비 설치
	야간	NATM1구간,수직구1번, NATM2구간	- 상반 굴착 및 보강, 수직구 굴착, TBM 조립 및 STP 설치	*****	********

○ 휴일근무 후 대체휴무(감리사)

구 분	근무일자		근 무 자	대체 휴무계획		비 고
				대체 휴무일	업무대행자
휴일작업	11.02(토)	주간	*****	11월04일(월)	******
		야간	*****	11월05일(화)	******
	11.03(일)	주간	*****
		야간	*****
	11.09(토)	주간	*****	11월11일(월)	******
		야간	*****	11월12일(화)	******
	11.10(일)	주간	*****
		야간	*****
	11.16(토)	주간	*****	11월18일(월)	******
		야간	*****	11월19일(화)	******
	11.17(일)	주간	*****
		야간	*****
	11.23(토)	주간	*****	11월25일(월)	******
		야간	*****	11월26일(화)	******
	11.24(일)	주간	*****
		야간	*****
	11.30(토)	주간	*****	12월02일(월)	******
		야간	*****	12월03일(화)	******

○ 건설사업관리단 검토의견

- 현재 터널1구간 NATM 터널 상·하반 굴착, 수직구 1번 토공 굴착 및 R/B 설치,

터널 2구간 TBM 조립 및 SPT설치등이 진행되고 있어 작업의 연속성 확보와 원활한 공정추진을 위해 시공사에서 요청한 휴일 및 야간작업 시행에 따른 공사관리의 공백이 발생치 않도록 평일과 동일하게 건설사업관리업무를 수행함이 적정하다고 사료되며,

- 건설사업관리단 근무계획에 따른 대가지급 계획은 원인자인 시공사에서 지급하는 것이 적정하다고 판단됨.

□ 검토 결과

○ 원활한 공정추진을 위하여 아래와 같이 휴일작업 조건 및 업무지시를 부여하여 휴일작업 계획을 승인하고자 함.

- 휴일작업 승인 조건

․휴일작업에 소요되는 건설사업관리기술자(감리원) 대가는 휴일작업계획의 적정성  여부 검토의견서와 같이 공사계약특수조건 제11조(휴일 및 야간작업)에 따라 지급

․소음 · 먼지 · 통행불편 등 민원이 발생하지 않도록 하고 보행자 및 차량 안전사고 주의

․휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

- 업무 지시

․공사장내 근로자 추락 관련 안전관리 강화

․건설사업관리기술자는 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도    감독 및 품질, 검수, 안전관리, 민원관리, 비산먼지 저감대책 등 철저

․건설사업관리기술자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치 되도록 관리할 것

․휴일 작업계획의 변경 시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업 시행토록 할 것

․사고 발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 관련 절차에 따라 상황 보고토록 할 것

․작업구간 정기순찰 점검실시 : 도로침하 및 파손 점검, 화재예방 점검 등

․개착구간 도로안전시설물 관리 및 교차로, 횡단보도 구간 안전관리 철저

․건설기계 및 중량물 취급 작업시 감리 확인 및 안전수칙 준수 철저

․휴일작업 시 발파를 지양하고 소음, 진동발생, 교통관리, 작업관리 철저

․소음, 진동을 수반하는 공종의 작업시간 준수 및 민원이 발생하지 않도록  관리철저

․‘건설공사장 안전사고 예방 중점관리 20대 항목’ 준수 철저

붙  임 : 관련공문 1부.  끝.