문서번호	디자인정책과-12447
결재일자	2019.10.29.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		디자인정책팀장	디자인정책과장
장은주		김남수	10/29 박숙희
협조
	주무관		문현일

2019년 ‘동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원(DDP)’

시설 개보수 및 공간 리뉴얼 추진 변경계획

2019. 10.

문화본부

(디자인정책과)

2019년 ‘동대문디자인플라자 및 동대문역사문화공원(DDP)’

시설 개보수 및 공간 리뉴얼 추진 변경계획

’19년 ‘DDP 시설 개보수 및 콘텐츠 공간 리뉴얼 사업’의 사업기간을 연장하여 DDP 시설의 항상성과 최적 운영을 위한 공간 환경을 유지하고자 함

▢ 변경근거

○ ’19년 DDP 시설 개보수 및 콘텐츠 공간 리뉴얼 대행계약서 제3조 및 제4조

◈ 제3조(사업의 대행)

② 재단은 사업을 시행하기 전 세부 사업 내용에 대해 시와 사전 협의하여야 하며, 사업내용의 변경이 불가피한 사정이 생겼을 경우 시와 재단이 협의하여 조정할 수 있다.

◈ 제4조(사업기한)

재단은 사업을 2019년 11월 30일까지 완료한다. 다만, 부득이한 사정으로 사업이 지연되는 경우에는 시의 동의하에 사업기한을 조정할 수 있다.

○ DDP 시설 개보수 및 콘텐츠 공간 리뉴얼 대행사업 점검결과 보고

(디자인정책과-12010호,2019.10.17.)

○ 2019년 DDP 시설 개보수 및 콘텐츠 공간 리뉴얼 사업 대행계약 변경 요청(서울디자인재단 DDP사업운영팀-665호,2019.10.23.)

▢ 변경개요

○ 변경내용 : 당초 2019.11.30. ⇒ 변경 2020. 6.30.(사업기간 연장)

○ 대상사업 : 2019년 추진사업(총 3개)

(단위 : 천원)

단위사업명	위 치	사업부문	소요예산
*			*********
**********	*****	****************	*******
		*********************	*******
	*******	******************	******

※ ②와 ③ 사업은 ’19.11월 까지 완료 예정임

▢ 변경사유

***********************

********************************************************************************************************

**********************************************************************************

※ DDP 대관관리시스템의 주요 활용부서 및 협의기능

주요 활용부서	주요 협의･관리기능
**************	************************
**************	**********************
**********	**************************
**********	*************************

○ DDP 대관관리시스템 구축 일정(안)

****************************

********************************

************************************

*****************************

*********************************

▢ 향후계획

○ ’19년 DDP 시설 개보수 및 리뉴얼 사업 대행 변경계약 체결 : ’19.10월

○ 대관관리시스템 구축 사업 추진(디자인재단) : ’19.11월 ~ ’20. 6월

○ ’19년 사업비 정산 : ’20. 7월 초

따로붙임 : ’19년 DDP 시설 개보수 및 콘텐츠공간 리뉴얼 대행 변경계약서(안) 1부.