문서번호	토목부-19493
결재일자	2019.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
김재건		박일연	10/29 代이동훈
협 조

준공기한 연기 검토보고

(고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사)

2019.10.

서울시 도시기반시설본부

(토 목 부)

고덕교 확장공사 준공기한 연기 검토보고

공사계약 후 착공이 지연된 고덕교 공사와 관련하여 준공기한(20년 1월)이 도래함에 따라 적절한 공기 연장이 필요하여 검토보고 드림

Ⅰ		관련근거

○ 공사계약일반조건 제26조(계약기간의 연장)

○ 고덕교 공사기간 연장검토 보고 건(창덕궁감 2019-149호)

○ 고덕교 공사 추진현황 보고(토목부-19004(19.10.21.)호)

- 현장여건을 고려하여 컨틸레버 형식으로 공법변경

- 준공기한 연기 추진

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 고덕교 확장 및 고덕 보도교 설치공사

○ 공사위치 : 강동구 강일동 599일원

○ 공사규모 : 교량확장 1개소(4차로→6차로), 보도교 설치 2개소, 연결보도 L=200m 신설

○ 공사기간 :′19.01.18. ~ ′20.01.17.

○ 총공사비 : 3,149백만원(도급비 1,066백만원, 관급비 1,713백만원)

○ 시공사/감리단 : 임원개발(주)외 1개사/(주)경동엔지니어링외 1개사

Ⅲ		검토내용

□ 준공기한 연기사유

○ *******************************************************

○ *************************************************************************

□ 공사기간 변경현황

구분	당 초	변 경	증·감	비고
총차	********************** ******	*********************** ******	*******	금액 변경없음
1차	*********************** ******	*********************** ******	*******	금액 변경 없음

Ⅳ		감리단 검토의견

○ 19년 말까지 공법변경 등 설계변경 완료후 20년 동절기 이후인 3월부터 본공사 착공이 시행될시 20년12월 준공 예정으로, 공사기간을 약 12개월 연장함이 합리적이라 판단됨

Ⅴ		조치계획

○ 지하지장물 저촉 및 관련기관 협의, 심의 등으로 착공이 지연되어 기 계약된 준공기한(′20.01.)까지 공사완료가 불가한 바, 감리단 검토의견과 같이 준공기한을 연기하고자 함

○ 연기에 따른 귀책소재 : 도급계약자에 있지 않음

붙 임 : 1) 감리단 검토의견서 1부.

2) 시공사 관련 서류 1부.

3) 고덕교 확장 추진관련 방침서 1부.  끝.