투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기 의뢰(남산예장자락 재생사업)

「남산예장자락 재생사업」 전기공사, 통신공사에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기 내용

연번	계약번호	계약건명	계약자	계약금액 (단위:원)	납품기한
					당초	변경
1	***************	********************	*****	***********	`19.12.31	`20.10.31
2	***************	******************	****	**********	`19.12.31	`20.12.31
3	****************	****************************	*******	**********	`19.10.31	`20.06.30
4	****************	*	*******	**********	`19.10.31	`20.06.30
5	****************	*	****	*********	`19.10.31	`19.12.31
6	****************	*	*******	*********	`19.10.31	`20.10.31
7	****************	********************	****	**********	`19.12.31	`20.12.31
8	****************	*	****	**********	`19.12.31	`20.12.31
9	****************	*	****	*********	`19.12.31	`20.12.31
10	****************	***********************	********	**********	`19.12.31	`20.12.10
11	****************	************ *************	****	**********	`19.12.31	`20.12.10
12	****************	*	****	*********	`19.12.31	`20.12.10
13	****************	*************************	***	**********	`19.12.29	`20.12.10
14	****************	*	****	**********	`19.12.29	`20.12.10
15	****************	*	*******	*******	`19.12.29	`20.12.10

나. 연기사유 : 사업기간 조정으로 자재 납품시기 미도래

붙임 : 1)납품기한 연기 보고서 1부.

2)납품기한 연기 합의서 각 1부.

	설비부장
주무관	정찬교		녹색성장과장	오삼록		설비부장	10/29 임정규
협조자
시행	설비부-16757	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	jamjaco@seoul.go.kr	/	부분공개(7)