문서번호	토목부-19570
결재일자	2019.10.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
차승환	김동현	代이동훈		10/29 김승원
협 조

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계  용역 -

준공기한 연기 검토 보고

2019. 10.

도시기반시설본부

(토목부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역 -

준공기한 연기 검토 보고

「 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계」 용역수행자가 제출한준공기한 연기요청에 대하여 검토 보고드림

※ 제일(발)2019-3216호(2019.10.28.)

□ 관련근거

❍ 계약기간 변경요청 [동일(도로) 제19-2754호(2019.10.24.)]

❍ 계약기간 변경에 대한 검토의견 [제일(발)2019-3216호(2019.10.28.)]

□ 사업개요

❍ 위    치 : 서울특별시 영등포구 양평동 월드컵대교 남단

❍ 규    모 : 연결로 5개소, 지하차도

- 남단IC 연결로(폭 1차로) : 교량 및 교각 형식 검토

- 강남방향 연결로(폭 1차로) : 접속방법 개선(지하차도 → 교량)

- 접속교 : 연결로 신설 및 변경에 따른 종단선형 검토

❍ 용역기간 : 2017. 8. 7. ~ 2019. 10. 31.

❍ 용역금액 : 3,089,303,000원

❍ 용 역 사 : ㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링,

㈜지아이건설기술그룹, ㈜수성건설엔지니어링

□ 추진경위

❍ 2017.02.16.: 월드컵대교 남단 보완설계 추진계획보고 (부시장 보고)

❍ 2017.03.28.: 월드컵대교 남단 보완설계 시행계획 검토 보고

❍ 2017.04.26.: 설계용역 추진방안 보고

❍ 2017.08.11.: 보완설계용역 계약 및 착수

❍ 2018.04.05.: 월드컵대교 남단 연결로 설치계획 보고

❍ 2018.11.28.: 설계변경에 대한 검토의견서 제출

❍ 2019.01.28.: 안양천 램프D 하천점용허가 요청

❍ 2019.02.11.: 월드컵대교남단 접속교(강북방향) 개량구조검토 제출

❍ 2019.03.25.: 보도육교 상부거더 형식추천(안) 검토의견 제출

❍ 2019.04.03.: 월드컵대교 남단 보완설계 디자인 심의 요청

❍ 2019.04.08.: 공사용 가도 및 암 파쇄 방호시설 관련 설계도서 제출

❍ 2019.04.22.: 양화인공폭포 설계도서 제출

❍ 2019.04.26.: 접속교 상부 설계도서 제출

❍ 2019.05.22.: 특정제품(공법) 심의 상정 의뢰서 제출

❍ 2019.05.22.: 접속교 하부 설계도서 제출

❍ 2019.07.03.: 서울특별시 공공디자인진흥위원회 실의결과 알림

❍ 2019.09.18.: 특정제품(공법) 선정 심사위원회 개최

❍ 2019.09.20.: 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완 설계 노선자문회의 개최

❍ 2019.10.11.: 백골부대 전적비 이전 부지 확보 관련 회의

□ 책임건설사업관리기술자 검토 결과

❍ 용 역 사 : ㈜제일엔지니어링

- 책임건설사업관리기술자

❍ 준공기한 연기 : 60일

- 용역기간 : 당초 ′17. 8. 7.~′19. 10. 31.⇒ 변경′17. 8. 7.~′19. 12. 31.

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 변경사유 :「월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역」이 지자체 민원 의견 반영에 따른 선형변경, 연결로 추가 설계등에 소요되는 실시설계 기간(2개월) 필요

□ 조치의견

❍ 상기 책임건설사업관리기술자의 준공기한 연기 요청이 적정함으로 준공기한 연기처리코자 함

붙임 : 1. 설계사업관리(설계감리) 준공기한 연기요청에 대한 검토의견 공문 1부.

2. 설계사업관리(설계감리) 검토 의견서 1부.

3. 설계용역자 준공기한 연기요청 1부.

4. 예정공정표 1부.

5. 합의각서 1부.

6. 월드컵대교 남단 보완설계 설계기간 연장 검토서 1부. 끝.