투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울도서관
수신	지식문화과장
(경유)
제목	발달장애인 쉬운 위인전(유관순) 제작 변경계약 의뢰

1. 발달장애인 쉬운 위인전(유관순) 제작을 계약 채결을 하여 시행중 디자인 심의 결과 반영을 위하여 변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 사 업 명 : 발달장애인 쉬운 위인전 (유관순)

- 업 체 명 : ********

- 계약금액 : ***********************

- 사업기간 :‘19.6.3.∼11.15.

나. 변경사유

- 10월 디자인 심의 결과 및 양성평등 제안에 대한 변경 기간

다. 변경내역

구분	기존	변경
계약기간	‘19.6.3.∼10.30.	‘19.6.3.∼11.15.

라. 예산과목 : 서울도서관 정보서비스과, 도서관 및 독서문화 진흥, 서울도서관 운영, 정보자료 관리 및 자료실 운영관리, 일반운영비, 사무관리비

붙임 – 발달장애인 쉬운 위인전 사업기간 변경계약 보고 1부.  끝.

	정보서비스과장
주무관	신명진		정보서비스과장	10/29 안옥연
협조자
시행	정보서비스과-9145	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가)	/
전화	02) 2133-0267	/전송	02) 2133-0391	/	incheonhi@seoul.go.kr	/	대시민공개