문서번호	도로보수과-10898
결재일자	2019.10.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	10/30 이학구
협 조
	주무관			代고석상

초기대응능력 향상을 위한 자동염수살포장치 설치 계획

2019. 10.

서부도로사업소

(도로보수과)

『초기대응능력 향상을 위한』

자동염수살포장치 설치 계획

『서울型 중･단기 제설 개선대책』일환으로 우리사업소 관내 제설 취약 구간인 서대문구 산골고갯길에 자동염수살포장치 설치를 통해 강설초기 도로결빙을 방지하고자 함.

□ 추진근거

○ 도로관리과-10777(‘19.10.25.)호

- 제설대책 추진을 위한 예산 재배정(액상살포장치 설치)

□ 자동염수살포장치 설치 현황

설치위치	규격	설치일시	비고
현저고가 하부 (성산로)	․ 배관길이 : 400m ․ CCTV : 2대 ․ 탱크용량 : 10톤	2012.11
금화터널~봉원고가 (성산로)	․ 배관길이 : 400m ․ CCTV : 1대 ․ 탱크용량 : 10톤	2015.11
금화터널~현저고가 (성산로)	․ 배관길이 : 200m ․ CCTV : 1대 ․ 탱크용량 : 10톤	2016.08
구파발역입구~박석고개 (통일로)	배관길이 : 600m ․ CCTV : 1대 ․ 탱크용량 : 10톤	2017.12
퇴계로 지하차도 주변 (소파로, 삼일대로)	․ 배관길이 : 250m ․ CCTV : 3대 ․ 탱크용량 : 5톤	2011.11	12월 말 재설치 예정 (도시기반시설본부)
성산로 (성산고가 하부)	․ 배관길이 : 100m ․ CCTV : 1대 ․ 탱크용량 : 5톤	2018.12.

□ 설치개요

○ 대 상 지 : 서대문구 산골고개

○ 선정사유 : 해당구간은 경사구배가 높아, 강설시 사고위험이 높고 결빙의 우려가 많음

○ 설치규모 : 저장탱크 10,000L / PE관 360m / 영상감지장치 1대/  기초 콘크리트 공사/전기, 통신 등 인입

○ 위치도 및 현장사진

위치도	펌프하우스 설치
노즐 설치(상행)	노즐 설치(하행)

○ 현황조사 및 검토의견

- 설치구간은 경계석이 중앙선을 기점으로 양쪽으로 설치되어 있어 3방향 설치 필요

- 자동염수살포장치 펌프하우스 설치를 위한 보도 설치 가능여부 협의 필요(관련기간 : 서대문구청 토목과)

- 해당구간은 지중화가 되어 있는 구간으로 전기 및 통신 시설 인입시 굴착 필요

□ 추진계획

○ 자동염수살포장치 및 살수기 조달구매(제3자 단가계약)

- 자동염수 살포장치 조달청 단가

품명	규격	단가	제조업체	인도조건	비고
눈및얼음 융해장치 (SRDFSPE1)	･ 저장탱크 10,000L ･ PE배관 100m	87,045천원/조	㈜에스알디코리아	현장 설치도	우수조달물품 ※ 전기시설 별도
살수기	･ PE배관 20m	2,690천원/대			옵션(선택사항) 추가구매

- 제품 선정 사유 : 조달청 우수제품으로 등록되어 있고 지능형 영상감지장치가 설치되어 있어 강설을 감지하고 분사하여 스스로 제설제를 분사토록 되어있어 강설치 초기대응에 용이하여 ㈜에스알디코리아 제품으로 선정

○ 자동염수 살포장치 전기시설(인입선) 설치 및 기타 공사

- 1인 견적 수의계약을 통해 공사 진행

‣ 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호(추정가격 2,000만원 이하)

□ 소요예산

○ 총 소요예산 : 약 142,015천원(배정예산 : 200백만원)

- 자동염수살포장치 구매 : 87,045천원

- 노즐 연장 설치(200m) : 34,970천원(2,690천원×13대)

- 전기시설 설치 및 기초공사 : 20,000천원

○ 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 시설비및부대비, 시설비

□ 향후계획

○ ’19.11월 초 ~ 12월 초     : 자동염수살포장치 설치

○ ‘19.12월 중               : 저장탱크 염수 주입

○ ‘19.12월 말 ~ ’20.03월 말 : 자동염수살포장치 운영

붙임 1. 제설대책 추진을 위한 예산 재배정 알림 1부.  끝.