문서번호	공공개발센터-9590
결재일자	2018.10.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	개발사업팀장		공공개발센터장		재생정책기획관		도시재생본부장
장승권	신윤철		이상면		김성보		10/17 강맹훈
협 조
	주무관					남희

「중랑·서남물재생센터 부지활용 기본계획수립 용역」

준공기한 연기계획 보고

2018. 10.

도시재생본부

(공공개발센터)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「중랑·서남물재생센터 부지활용 기본계획수립 용역」

준공기한 연기계획 보고

「중랑·서남물재생센터 부지활용 기본계획수립 용역」과 관련하여 현대화사업 범위 결정지연 등에 따른 용역기간 절대 부족함에 준공기한 연기계획에 대하여 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 중랑·서남 물재생센터 부지활용 기본계획수립 용역

○ 계약금액 : 715,500천원 (1차년도 287,300, 2차년도 432,700)

○ 용역기간 : `17. 8. 3  ~ `18. 11. 3 (1차 완수일자 `17.12.30)

○ 계약상대 : ㈜희림종합건축사사무소 + ㈜일로종합건축사사무소

○ 과업내용

- 기본방향 : 현황조사, 기본구상, 주변연계, 시설현대화 연계 기술검토 등

- 사 업 화 : 기본구상 및 사업방식 비교, 경제성(수익) 분석, 사업방식 제시 등

- 기본계획 : 주요목표설정, 부분별 계획, 도시관리계획 변경, 제영향검토 등

□ 추진경위

[계약관련]

○ `17.08.03 : 용역계약  (착수보고 `17.8.21)

○ `17.11.21 : 용역변경 계약 [상호변경 : 일로건축 →  ㈜일로종합건축]

○ `17.12.13 : 용역변경 계약 : 1차년도 직접경비 정산 및 준공

- 당초금액 : 720,000천원 (1차수 287,300, 2차수 432,700)

- 변경금액 : 715,500천원 (1차수 282,800, 2차수 432,700)

○ `17.12.15 : 1차수 용역 준공 (준공금액 282,800천원)

○ `18.01.01 : 2차수 계약 (총액 715,500천원 / 2차수 432,700천원)

[계획관련]

○ `17.09.27/`18.03.27/`18.6.27 : 집중검토 워크숍 추진 (3회)

- 물순환정책, 부지활용 자문 / 토지이용계획, 개발컨셉 자문 / 도입콘텐츠 자문

○ `17.09 ~ `18.10 : 각종보고 협의 65회

- 부지활용+시설현대화 TF회의(16회), 실무회의(25회)

- 관계기관(부서) 협의(9회), 견학 및 현장조사(각1회), 보고 및 자문(13회),

******************************

*****************************************************

******************************

***************************************************

□ 준공기한 연기

○ 준공기한 변경 : 증146일 (약5개월)

- 당초 : `18.1.1 ~`18.11.3 [총기간 :`18.8.3.~`18.11.3]

- 변경 : `18.1.1 ~`19.3.29 [총기간 :`18.8.3.~`19.3.29]

※ 계약금액 등 기타 변경사항 없음

○ 귀책사유 : 서울특별시

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유 : 시설현대화 범위 등 결정 지연에 따른 절대기간 부족

***********************************************

*****************************************

***************************************************

*************************************

*****************

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 향후계획

○ `18.11~12 : 선도사업 구체화(사업방식, 콘텐츠 등) 및 관계기관 협의

○ `19.01~02 : 마스터플랜 수립 및 타당성 조사

○ `19.03      : 보고 및 준공

□ 조치의견

○ 시설현대화 사업범위, 사업비, 사업기간 등 확정(결정)지연 등으로 용역추진 절대기간이 부족함에 따라 `18.3.29까지 준공기한 연기처리하고자 함. 끝.