문서번호	치수과-2274
결재일자	2019.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김동식		손창열	07/10 전영주
협조

『한강공원 보행잔교  설치 타당성 조사 및 기본계획 용역』  완수기한 연기 보고

2019. 07.

『한강공원 보행잔교  설치 타당성 조사 및 기본계획 용역』

완수기한 연기 보고

□ 공사개요

○ 용 역 명 : 가양 나들목 개선공사

○ 용역내용 : 한강공원 보행잔교 타당성조사 및 기본계획 수립

○ 용역기간 : ‘18.11.27.~’19.07.26

○ 계 약 자 : 주식회사 동일기술공사 황주환

○ 용 역 비 : 81백만원

□ 완수기한 연장 검토

○  완수기한

- 당  초 : 2018.11.27. ~ 2019.07.26.

- 변  경 : 2018.11.27. ~ 2019.10.31.

○  연기사유

- 한강공원 보행잔교 기본계획 수립을 위한 전문가 자문(한강시민위원, 유관부서 등) 의견수렴 및 반영을 위해 완수기한 연장이 필요함.

□ 귀책소재 및 지체상금 부과

○ 연기 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부 과