의원 요구 자료 제출

시 행	서남권사업과-9570	(		)
접 수		(		)
결재일자	2019.10.15.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	윤호중국회의원실,기획담당관,동남권사업과장

주무관	사업기획팀장	서남권사업과장	지역발전본부장		결재
이은정	김태진	오희선	10/15 김선순
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 3158번, 윤호중 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

윤호중 의원(국토교통위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호: 3158번

2. 마곡 스마트시티 관련

- 주요내용, 성과, 계획 등

□ 의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

2. 마곡스마트시티 관련(주요내용, 성과, 계획 등)

○ 사업개요

- 사업내용: 스마트시티 인프라 구축, 리빙랩 운영, 미래산업 테스트베드 조성 등

- 추진주체: 서울특별시·서울주택도시공사

- 사업기간: `18. 7월 ~ `22. 12월

- 추진방향

• 도시혁신의 새로운 모델인 스마트시티 시범(실증)단지 단계적 조성

• 신기술 실험·실증을 통한 기술개발 결과에 따라 리빙랩 확대 강화

○ 세부 추진계획

스마트시티 인프라 구축 (서울주택도시공사 추진)

- 추진목적: 시민들이 스마트시티 효과를 체감할 수 있는 시민밀착형 서비스 구현

- 추진방법: 마곡 도시개발사업 기반시설 조성

- 주요내용: 시민․기업 체감할 수 있는 도시형 스마트 기술 기반 구축

• 무선망 구축 및 스마트 조명·태양광 등 안전, 에너지, 생활, 기타 서비스 구현

- 추진실적

• `19. 4. : 마곡광장 및 서울식물원 스마트시티 시민체감형 시범존 구축

‣ 스마트 횡단보도·가로등, 스마트 대기질 안내, 스마트 쿨링·포그, AR·VR 체험 존 등

• `19. 9. : 무선망(Wi-Fi) 87개소 구축 완료(버스정류장.가로등, 공원 등)

-  향후계획

• `19.11. ~ : 무선망(Wi-Fi) 22개소 추가 구축(총 109개소)

• `19.12. ~ : 112, 119 긴급출동 지원을 위한 CCTV 연계(중앙센터, 관할서 등)

• `20. ~ `22 : 도시 및 시민행동 데이터를 분석‧가공 할 수 있는 도시관리 플랫폼 연구 개발 및 시민체감형 서비스 지속 발굴 추진

‣ 복합센서 설치 : 버스정류장, CCTV폴 등 상시전원 공급 장소

‣ 친환경 단거리 이동수단(전기자전거, 스쿠터 등), 미래형 교통기술 및 서비스로봇 도입방안

마곡 드론 테스트베드 조성방안 및 활성화 연구용역 추진

- 추진목적: 마곡지구 내 유보지 등을 활용하여 마곡을 드론산업 실증공간으로 조성
(※ 구체적 사업계획은 용역 결과에 따라 수립 예정)

- 용역기간 및 용역비: '19. 8.6. ~ 11.7.(3개월) / 14,600천원

- 수행기관: 배재대학교 산학협력단

- 추진실적

• '19. 7.19. : 연구용역 계약 체결

• '19. 8.22. : 착수보고

‣ 테스트베드 활용 수요 검토, 소규모 드론 시험비행구역 조성 방안 논의

• '19. 9.27. : 중간보고

‣ 관제권내(김포공항 9.3㎞ 이내) 비행승인 방안 모색

‣ 드론관련 업계 수요 및 수도권 내 시험비행장 및 교육장 필요, 드론산업 활성화를 위한 정부지원 및 시장형성 확대 요구사항 파악 등

-  향후계획

• `19.12 : 용역 결과 반영, 마곡 드론 테스트베드 조성 여부에 따른 계획 수립예정

스마트 도시 실증을 위한 리빙랩 공모사업 추진

- 추진방향: 과제 선정에서부터 과제 증명 및 결과 평가까지 사업 전과정에 전문가 및 시민이 참여하는 시민참여형 연구 추진

- 추진방법: 공모를 통한 과제선정 및 시민참여형 과제 수행

- 지원대상: 스마트시티 분야 소셜벤처 기업 및 마곡 입주 기업, 시민 등

- 지원내용: 실험 및 증명 비용지원(과제당 1억원 기준, 총 5개)

- 추진실적

• `19. 4. ~ 5. : 리빙랩 사업 공모

• `19. 6.20    : 지원사업 선정(5개)

‣ 냄새 커뮤니티 매핑, 시각장애인 스마트오더 앱, 아파트 화재감지 앱 개발, 자율주행
로봇 음식배송 기술 연구, IoT 전동킥보드 및 스테이션 운영 등

• `19. 7.10.   : 유관기관 사업설명회

‣ 강서구, 강서경찰서, 소방서 등 대상  5개 프로젝트 소개 발표 및 협력사항 논의

• `19. 9. 24   : 중간평가 실시

‣ 5개 프로젝트 시민참여 유도방안 마련 등 일부보완을 통한 사업 지속 추진

-  향후계획

• `19.12 : 최종사업평가 및 사업성과 보고회, '20년 사업계획 수립

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (서남권사업과)	담당사무관	김태진
	☎ 2133-1533	담당자	이은정
	작 성 일 : 2019.10.15.