문서번호	기전과-6154
결재일자	2019.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
이태근		代김용문	10/31 김영삼
협조

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』

낙찰차액 사용계획 보고

2019. 10.

남부도로사업소

(기전과)

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』

낙찰차액 사용계획 보고

2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가) 중 규제심의

사항과 민원 증가에 따른 공사비 부족으로 낙찰차액을 사용코자함.

Ⅰ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

□ 공사위치 : 관내(동작, 관악, 금천, 서초, 영등포 일부)

□ 공사내용 : 교통안전표지 신설(서울지방경찰청 규제) 및 일상 유지보수

□ 계약금액 : ************

□ 계약업체 : ******************

□ 계약기간 : 2019. 2. 22. ~ 12. 27.

□ 책임감리업체 : ***************

Ⅱ
		예 산 현 황

□ 예산집행현황

(단위 : 원)

구 분	발주금액	계약금액	낙찰차액	비 고
계	**********	**********	**********
도급비	**********	**********	***********

※ 지출가능금액 : 11,329,180원

□ 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리

교통사업특별회계, 교통안전표지설치및유지보수, 시설비

Ⅱ
		현 안 사 항

□ 교통안전표지 신설요청(경찰청 규제사항) 및 태풍 등의 영향으로 민원이 증가하여 추가 소요예산 확보가 필요함.

□ 추가소요예산 : 11,320,000원

- 교통안전표지 신설 : 8,000,000원(160,000원× 50개소)

- 교통안전표지 보수 및 기타 : 3,320,000원 × 1식

Ⅲ
		조 치 방 안

□ 물량 증가에 따른 예산이 부족한 실정으로 사용가능한 낙찰차액

(11,329,180원) 중 11,320,000원을 활용하여 사업구간 내

교통안전표지 신설 및 유지보수 등에 사용하고자 하며,

□ 추후『교통안전표지 신설 및 유지보수공사』설계변경(증액)을 시행

하여 사업을 추진코자함.

Ⅴ
		향 후 계 획

□ 2019. 11.04. : 설계변경 시행

□ 2019. 11.29. : 공사준공.  끝.