문서번호	도시재생과-6085
결재일자	2019.10.31.
공개여부	부분공개
방침번호	구청장 방침 제356호

주무관		재생시설팀장		도시재생과장	스마트포용도시국장		부구청장		구청장
김성옥		김정현		이경생	김철순		한영희		10/31 정원오
협조	치수과장		민병기
	토목과장		오석관
	도로조명팀장		이천영
	하수계획팀장		백원기

★ ◉

- 공감과 공유가 있는 용답동 골목길 재생사업 -

용답21길(시범구간) 환경개선 공사 시행계획

2019. 10.

(도시재생과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [√] ( 재생정책과 ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [ ]
		●	민간단체	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 공감과 공유가 있는 용답동 골목길 재생사업 -

용답21길(시범구간) 환경개선 공사 시행계획

용답동 골목길재생 지역의 용답21길(시범구간)에 대해 골목길 정주환경 개선과 밝고 안전한 골목길을 연내 조성하여, 주민참여 확대 및 체감도를 높여 사업의 효율성을 극대화 하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 용답동 골목길 재생 선정[서울시재생정책과-9185호, 2018.8.10.]

Ⅱ		추진경위

□ 2018. 8.        서울형 골목길 재생사업 선정

□ 2019. 1.         실행계획 수립 및 공동체 기반조성 용역 착수

□ 2019. 3. ~ 10.   주민의견수렴 및 사업 설명회 추진

(주민설명회, 찾아가는 돗자리 설명회, 간담회 등)

□ 2019. 9.         공동체 프로그램 운영(도시농업 등)

□ 2019. 9. 9.      서울시 골목길재생 자문위원 실시설계 자문회의

□ 2019.10.  .      시비 재배정 예산 교부 통보(예정)

< 용답동 골목길 재생 사업 개요 >

사업기간: 2018. 9 ~ 2020. 12.

위치(규모): 용답21길 일대(골목연장 800m, 면적: 33,205㎡)

사업내용: 생활밀착형 주거환경개선 및 공동체 활성화

총사업비: 11억 원(시비 10억 원, 구비 1억 원)

Ⅲ		공사개요(시범구간)

□ 기    간: 2019. 10. ~ 11. 30.

□ 위    치: 용답 21길

□ 규    모: B=3~3.4m, L=123m, 담장·대문 등 정비=13개 주택

□ ************************

□ 공사내용

○ 하수관로(D=450mm이하, 123m), 맨홀(7개소) 교체 정비

○ 도로 포장(보차도용 콘크리트 블록)

○ 빗물받이 등 배수시설 정비

○ LED 바닥등 및 고보조명 설치

○ 노후 담장·대문 정비, 자전거 거치대, 스트리트 퍼니처, 채광벽, 화단조성 등

(주택 부수시설 정비에 동의한 주택에 한 함)

□ 현 황 도(시범구간)

□ 조 감 도(전·후)

변경 전                                                 변경 후

Ⅳ		세부 시행계획

□ 토목공사: 치수과에 공사 의뢰

○ 골목길 재생사업의 체감도 및 주민참여도를 높이고 동절기 도래에 따른 조속한 공사 시행을 위해 치수과「2019년 관내 하수시설물 유지보수공사 (단가계약)」에 포함하여 공사 완료 후 정산

○ ****************

- *******************************

○ 공사내용

- 하수관로 교체 공사(L=123m, D=450mm 이하)

- 도로포장(보차도용 콘크리트 블록) 공사, LED 바닥등 설치

- 건축분야: 노후 담장·대문 정비, 화단 조성 및 주민편의 시설 설치 등

(주택 부수시설에 대한 정비는 공사 동의한 주택에만 해당 됨)

□ 조명공사: 토목과(도로조명팀)에 설치 의뢰

○ 고보조명 2개소 설치 및 LED보안등 1개소 교체

○ **************

Ⅴ		추진일정

□ 2019. 10. 29. : 용답 골목길 재생지역 시범구간 공사 의뢰

(도시재생과 → 치수과, 토목과)

□ 2019. 10. 29. ~ 11. 30 : 공사 시행

Ⅵ		행정사항

□ 골목길 환경개선 공사 시행: 치수과(하수계획팀)

□ 조명공사 시행: 토목과(도로조명팀)

□ 공사 시행 안내 및 홍보: 용답동주민센터

□ 공사 단가계약 포함시행 계약 협조: 재무과.  끝.