문서번호	도로보수과-10525
결재일자	2019.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
주영진		류태용	10/31 박문희
협조

2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제3차 작업지시 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 10

강서도로사업소

(도로보수과)

2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제3차 작업지시 완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2019. 3. 14. ~ 2019. 12. 31.

○ 시공업체 : ㈜ 렉스  대표 전현신

○ 도 급 비 : 640,762,640원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제3차)

○ 작업위치 : 영등포구 의사당대로 국회의사당 주변 재도색 등 65개소

○ 작업기간 : 2019. 09. 02. ~ 2019. 10. 31.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	238,863천원	183,409천원	감) 55,454천원
관 급 비	62,637천원	56,660천원	감) 5,977천원
총 공사비	301,500천원	240,069천원	감) 61,431천원

○ 작업내역 및 증감사유

연번	위 치	작업 공종	단 위	작업지시 수량	작업완료 수량	증,감	사유
1	영등포구 의사당대로 국회의사당 주변	제거,도색	M	5,251	-	감)5,251	신호 선작업 미실시
2	영등포구 의사당대로 83 (여의도광장교차로)	도색	M	121	-	감)121	작업취소
3	양천 목동서로 161(SBS 본사) 앞	도색	M	10	10	0
4	양천구 신정로 일부구간(궁동터널~서부트럭터미널R)	제거, 도색	M	432	552	증)120	실작업에 따른 물량증가
5	양천구 목동로213(화성빌딩) 앞	도색	M	23	16	감)7	“
6	영등포구 문래로 30길 영일시장(진양상회→제주상회)	제거, 도색	M	1,238	-	감)1,238	신호 선작업 미실시
7	강서구 화곡동 799-9(남부시장 주차장 인근)	제거, 도색	M	33	42	증)9	실작업에 따른 물량증가
8	강서구 화곡동 345-12(성재센트리움아파트 인근)	제거, 도색	M	66	82	증)16	“
9	강서 방화동 838(정곡초교 인근)	제거, 도색	M	63	66	증)3	“
10	강서구 화곡사거리	제거, 도색, 재도색	M	3,150	4,195	증)1,045	화곡터널입구-화곡사거리 추가작업
11	강서구 강서로 163~131(화곡역~화곡터널 북단)	제거, 도색, 재도색	M	1,395	1,395	0
12	강서구 양천로488~462(가양역~가양3,5단지 앞)	제거, 도색, 재도색	M	1,966	2,650	증)684	퇴색 노후구간 재도색
13	강서구 양천로431~452(홈플러스 가양점~가양3,5단지 앞)	제거, 도색, 재도색	M	1,670	3,627	증)1,957	“
14	강서구 양천로394~401(가양오토갤러리~홈플러스 가양점 앞)	제거, 도색, 재도색	M	2,656	4,049	증)1,393	“
15	강서구 양천로354~391(양천향교역~가양오토갤러리)	제거, 도색, 재도색	M	2,376	5,905	증)3,529	“
16	구로구 디큐브시티 앞 사거리	도색	M	23	18	감)5	실작업량 증.감에 따른 물량변경
17	구로구 가리봉사거리(디지털단지오거리→구로IC)	도색	M	22	15	감)7	“
18	구로구 오금교 남단(서부간선도로램프→오금교)	제거, 도색	M	249	265	증)16	“
19	구로구 구로IT타워(디지털단지오거리→디지털1단지)	도색	M	18	18	0
20	강서구 공항동 73-3(김포공항입구삼거리)	재도색	M	480	234	감)246	실작업량 증.감에 따른 물량변경
21	구로동1281(한일유앤아이아파트)	제거, 도색	M	180	188	증)8	“
22	남부순환로 577(강월초교 입구)	재도색	M	480	255	감)225	“
23	영등포구 당산동3가 3-1(영등포경찰서 앞)	재도색	M	404	273	감)131	“
24	양천구 오목로 232부근(목동역상가 부근)	제거, 도색, 재도색	M	1,608	2,690	증)1,082	구간내 차선이 퇴색되어 재도색
25	양천구 오목로 101 부근(양강초등학교 부근)	제거, 도색	M	778	-	감)778	기 작업완료
26	양천구 등촌로 22 앞(홍익병원 목동관 앞)	제거, 도색	M	1,960	-	감)1,960	차로폭 협소작업불가
27	양천구 등촌로 216 앞(제일은행 등촌지점 앞)	제거, 도색, 재도색	M	527	490	감)37	실작업량 증.감에 따른 물량변경
28	양천 신정동 729(금옥중학교 앞)	제거, 도색, 재도색	M	542	150	감)392	“
29	강서구 등촌교차로	제거, 도색	M	4,092	4,092	0
30	영등포구 양화대교 남단 노들길 진출램프 주변	제거, 도색	M	392	395	증)3	실작업량 증.감에 따른 물량변경
31	영등포 도림동 도림고가차도 위	재도색	M	138	-	감)138	기 작업
32	영등포구 의사당대로 154(여의교교차로)	도색	M	40	40	0
33	영등포구 여의도동 80-9(여의하류IC 주변)	제거, 도색	M	70	225	증)155	실작업량 증.감에 따른 물량변경
34	구로구 천왕동 산 13-2(성광교회 앞 교차로)	도색	M	66	42	감)24	“
35	구로구 중앙로 76(서울고척우체국 앞)	도색	M	16	9	감)7	“
36	강서구 화곡동 897-1 (조마루 감자탕 인근)	제거, 도색	M	321	285	감)36	“
37	강서구 방화동 282-1 (성지한의원 앞)	도색	M	66	66	0
38	강서구 방화동 571-1 (미스터피자 방화점)	도색	M	33	33	0
39	영등포구 청과시장입구(구 영등포고가 밑)	제거, 도색	M	917	1,087	증)170	실작업량 증.감에 따른 물량변경
40	영등포구 영등포구청앞교차로	제거, 도색	M	675	-	감)675	신호팀 선작업 미실시
41	영등포구 경인고속입구교차로	제거, 도색	M	2,952	1,735	감)1,217	실작업량 증.감에 따른 물량변경
42	구로구 신도림역앞	제거, 도색, 재도색	M	1,080	2,218	증)1,138	구간내 차선이 퇴색되어 재도색
43	영등포구 국회의사당앞	제거, 도색	M	2,959	-	감)2,959	신호팀 작업 안되어서 불가
44	양천구 목동사거리	제거, 도색, 재도색	M	969	584	감)385	실작업량 증.감에 따른 물량변경
45	강서구 양천로 20길 입구 피자마루 앞	재도색	M	44	44	0
46	양천구 목동로 오금지하차도 상부 교차로	재도색	M	204	164	감)40	실작업량 증.감에 따른 물량변경
47	양천구 목동신시가지3단지아파트 328동 앞	재도색	M	226	226	0
48	양천 신정동 322-4(목동10단지APT 상가 대림아크로빌) 일대	재도색	M	318	318	0
49	양천구 신정동 324-4(목동10단지APT 1027동 앞)	재도색	M	249	512	증)263	실작업량 증.감에 따른 물량변경
50	강서구 한국가스공사~KBS아레나	재도색	M	2,775	-	감)2,775	포장예정구간
51	양천구 신월동888	재도색	M	98	98	0
52	강서구 화곡로 242번지 앞	재도색	M	70	210	증)140	실작업량 증.감에 따른 물량변경
53	영등포구 문래동3가 54-34	재도색	M	240	240	0
54	강서구 화곡로 398	도색	M	34	34	0
55	영등포구 여의도환승센터	재도색	M	225	225	0
56	영등포구 버드나루로	재도색	M	7,378	7,308	감)70	실작업량 증.감에 따른 물량변경
57	양천구 SBS 앞	재도색	M	81	81	0
58	구로구개봉로20길30	도색	M	120	96	감)24	실작업량 증.감에 따른 물량변경
59	구로구 개봉로20길 22	도색	M	120	96	감)24	“
60	영등포구 여의서로 (국회3문 앞)	도색, 재도색	M	18	18	0
61	양천 목동동로81 해누리타운앞	재도색	M	195	195	0
62	영등포구 영중로	도색	M	1,794	2,183	증)389	실작업량 증.감에 따른 물량변경
63	영등포구 버드나루로-굴착복구	도색	M	4,950	5,043	증)93	“
64	강서구 강서로 163~131(화곡역~화곡터널 북단) -굴착복구	도색	M	928	928	0
65	영등포구 국회대로652(기사식당앞) 외 109개소	도색	M	14,014	14,014	0
	합계		M	76,588	70,029

□ 검토 및 조치계획

○ 상기 사항과 같이 일부 현장여건 변경 등에 따라 물량변경이 발생하였으며, 작업완료에 대해서 추후 설계변경 정산처리 하고자 함.

붙 임  1. 제3차 작업완료 내역서 1부.

2. 제3차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제3차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.