투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰[서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 폐기물 처리 용역])

1. 서울숲공원지원과-2191(2019.10.31)호의 관련입니다.

2. 서울숲공원지원과에서 추진 중인「서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 폐기물 처리 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울숲 수변(중앙)호수 수질개선사업 폐기물 처리 용역

나. 공사기간 : 2019. 8. 05.~2019. 11. 02.

다. 도급금액 : ***********

라. 도 급 자 : ***********

마. 준공기한 연기

- 당초 : 2019.08.05. ~ 2019.11.02.

- 변경 : 2019.08.05. ~ 2019.11.29.(27일 연장)

바. 연기사유 : 연못 준설토가 충분히 건조되지 않아 외부반출이 불가능한 상황으로 준설토의 추가 건조기간이 필요함

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 :  준공기한연기검토 보고 1부.  끝.

	서울숲공원지원과장
주무관	이정호		서울숲관리팀장	강명환		서울숲공원지원과장	10/31 송복식
협조자
시행	서울숲공원지원과-2193	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273 (성수동1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-460-2983	/전송	02-460-2989	/	alrai@seoul.go.kr	/	부분공개(5)