문서번호	시설관리과-20585
결재일자	2019.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리과장	북부수도사업소장
박미영	변재홍	10/31 박병권
협 조	급수운영과장		유승효
	주무관		윤승구
	주무관		최용진
	주무관		이선우
	기전팀장		박성철

『2020년 419배수지 외 2개소』 정밀안전진단 용역 추진계획

2019. 10.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『 2020년 419배수지 외 2개소』 정밀안전진단 용역 추진계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제12조(정밀안전진단의 실시)에 따라 419배수지 외 2개소 상수도시설물에 대한 정밀안전진단을 실시하여 시설물의 안전성 확보 및 유지관리에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)

○ 2020년  배수지․아리수올림터 정밀안전진단(점검) 추진계획

(본부 시설관리과 –10357(2019. 10. 18.))

○ 시설물 안전점검 실시 주기

안전등급	정 밀 점 검		정밀안전진단	비 고
	건 축 물	상수도(그 외 시설물)
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B․C등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D․E등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

Ⅱ		그 간 추진사항

□ 안전진단 관리대상

구 분	계(개소)		배수지(개소)	아리수올림터(개소)	비 고
1종시설물	계	16	8	8
	급수운영과	7	3(공릉, 월계, 상계)	4(상계,중계,쌍문1,쌍문2)
	시설관리과	9	5(4.19, 번동소, 우이, 수유5, 수유6)	4(미아, 수유, 우이, 번동)

□ 최근 5년간 안전점검 현황

연도	계	정밀안전진단	정밀점검	비 고
2014년	16개소	공릉배수지 외 15개소 (3개소 A등급)(13개소 B등급)	-	A.B등급
2016년	11개소	-	공릉배수지 외 10개소	B등급
2017년	5개소	-	쌍문1가압장 아리수올림터 외 4개소	A등급
2018년	11개소	-	공릉배수지 외 10개소	B등급
2019년	12개소	공릉배수지 외 11개소		진행 중

Ⅲ		추진계획

□ 2020년도 정밀안전진단 점검대상

○ ’20년도 대상 선정 : 2014년 정밀안전진단 시 A등급 시설물

※ 정밀안전진단 A등급 시설물은 6년마다 1회 안전진단 실시

○ 배수지 2개소 3,200㎥/일, 아리수올림터 1개소 560㎥/일

구 분		대상 시설물	위 치	용 량(㎥/일)	준공연도	비 고
계			5개소	3,760
정밀안전진단	배수지	계	2개소	3,200
		419배수지	강북구 수유4동 산73번지 3	2,000	1983년
		수유5배수지	강북구 수유5동 산127번지 1	1,200	1991년
	아리수 올림터	계	1개소	560
		쌍문1아리수올림터	도봉구 쌍문1동 460-19	560	1983년

□ ‘20년 정밀안전진단 용역개요

○ 용역내용

용 역 명	시 설 물 명	사업비 (백만원)	비고
2020년 419배수지 외 2개소 정밀안전진단용역	419배수지, 수유5배수지, 쌍문1아리수올림터	72

○ 추진기간 : 2020. 3. ~ 2020. 11.

○ 소요예산  : 72백만원

○ 예산과목 (가압장․배수지 등 시설물유지관리 - 상수도시설물안전진단)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 계약방법 : 일반공개경쟁입찰

□ 과업내용

○ 시설물 관련도서 검토 및 계획수립

○ 기 실시한 진단결과 주요사항에 대한 보수 이력을 확인

○ 현장조사 실시

○ 제반관련 시험실시 – 비파괴 현장 시험등

○ 시설물별 조사결과 분석

○ 종합적인 상태평가 : 구조적 상태평가, 기능적 상태평가

- 시설물 기초와 주위 지반으로 구조에 미치는 영향분석

- 구조물 외관조사 및 비파괴 현장시험, 초음파 측정, 재료시험 결과분석

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 등급에 대한 소견

○ 보수·보강 공법 및 개략 공사비 제시

○ 보고서 작성 및 기타(유지관리 방안 제시)

【선택과업(내진성능평가) 추가 시행】

○ 내진설계 대상시설물 중 내진성능평가 미시행 시설물은 정밀안전      진단시 내진성능평가 포함 시행

‣관련법령:시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제12조(정밀안전진단의 실시)

③ 관리주체는 「지진·화산재해대책법」 제14조제1항에 따른 내진설계 대상 시설물 중 내진성능평가를 받지 않은 시설물에 대하여 정밀안전진단을 실시하는 경우에는 해당 시설물에 대한 내진성능평가를 포함하여 실시하여야 한다.

○ 내진성능평가 시행시 설계도면 부재에 따른 설계도면 복원 추가 용역 시행

○ 성능평가 및 복원도면 금회 대상(총3개소) : 배수지 2개소, 아리수올림터 1개소

- 419배수지, 수유5배수지,  쌍문1아리수올림터

□ 추진일정

○ 2019. 11.    : 자료조사 및 설계서 작성, 기술용역타당성 심사 요청

○ 2020.  2.     : 용역발주

○ 2020.  4.     : 용역 착수보고회 개최

○ 2020.  4.~ 11. : 사업추진

※ 2020년도 상반기․하반기 배수지 청소일정과 병행 시행

○ 2020. 10.     : 용역 최종보고회 및 결과 보고

○ 2020. 11.     : 용역 준공 및 FMS(facility management system) 관리

Ⅳ		행정사항

○ 용역 기술용역타당성 심사결과 보고(본부 시설관리과) : 11월 15일까지

○ 정밀안전진단용역 FMS(facility management system) 실적입력

○ 정밀안전진단용역 최종 결과보고 : 본부 시설관리과

붙임  1. 관련법규(정밀안전진단·정밀점검) 1부.

2. 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 등에 관한 지침 1부.

3. 용역설명서, 과업내용서, 발주내역서 1부.  끝.