“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(창신3동 공동이용시설 도서관 실내공간조성 및 시설구축 용역)

1. 주거재생과-12910(2019.10.29.)호와 관련입니다.

2. 창신3동 공동이용시설 도서관 실내공간조성 및 시설구축 용역에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 창신3동 공동이용시설 도서관 실내공간조성 및 시설구축 용역

- 계 약 자 : ㈜비알네트콤 대표 변준우

- 계약금액 : 금341,000,000원

나. 계약변경사항

- 과업기간 : 당초 ‘19.2.13.~10.31. ⇒ 변경 ’19.2.13~12.13.

다. 과업기간 변경사유

- 국내 최초의 여성사도서문화공간 조성을 위한 관련 전문가 자문 및 유사기관 현장조사 등 세심한 운영방안 마련과 이에 따른 내부 공간 조성 시공기간 확보가 필요함.

라. 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책:서울특별시)

붙임 : 1) 준공기한 연기보고서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 합의각서 및 관련공문 각 1부.  끝.

	주거재생과장
주무관	임복섭		주거재생계획팀장	류대근		주거재생과장	10/31 양준모
협조자
시행	주거재생과-13026	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 세종대로 1101 11층	/
전화	2133-7171	/전송	2133-0747	/	serbee@seoul.go.kr	/	부분공개(5)