문서번호	한양도성도감-11254
결재일자	2019.11.1.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

					시 민
★주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장	문화본부장
박근우	곽동진	안중호	11/01 유연식
협 조

한양도성 인왕산구간 군초소  철거 및 성벽복원공사 완료보고

- 한양도성 인왕산 구간 -

『군초소 철거 및 성벽복원공사』 완료 보고

2019.11.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

인왕산구간 군초소 철거 및 성벽복원공사 완료 보고

“인왕산을 시민의 품으로” 의 취지로 완전 개방된 인왕산의 한양도성 구간에 성벽을 훼손하고 있는 군초소 17개소 철거 후 성벽복원공사를 완료하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 사 업 명 : 한양도성 인왕산구간 군초소 철거 및 성벽복원공사

□ 위    치 : 한양도성 인왕산 구간(약 4km)

□ 공사기간 : 2018.11.19. ~ 2019.10.2.(준공검사  ‘19.10.14)

□ 공동도급 : 원택건설㈜ ******, 유한회사 서림문화재 ******

□ 공 사 비 : ************

□ 공사내용

- 한양도성 인왕산 구간(4km) 성벽에 불어있는 군초소 17개소 철거

- 철거 후 훼손된 성벽복원 및 주변 지형 회복

- 군 경계초소 주변 경관저해 시설(폐통신지주, 고사목 등) 정비

Ⅱ		추진내용

□ ‘18.11.19 : 공사 및 감리(비상주) 용역 착수

□ ‘18.12.10 : 착수보고회(*************) 및 문화재 전문가 자문(1차)

□ ‘19. 3. 5 : 설계변경 보고(1차)

- 군부대 내부 급경사지에 위치한 64-2T 초소 존치 결정

- 스토리텔링용 존치 초소 위치 변경(63-3T → 63-1T)

□ ‘19. 3~9 : 문화재 전문가 자문(3회)

□ ‘19. 9.17 : 설계변경 보고(2차)

- 문화재 전문가 자문의견 반영을 위한 62T 여장 옥개석 및 내측 석축 변경 시공

□ ‘19. 9.17 : 공사·감리용역 변경계약

- 변경 시공을 위한 공사·용역기간(준공기한) 변경계약(‘19.9.18 →’19.10.2)

□ ‘19.10.14 : 준공

철거 전	철거 후

※ 공사 전·후 사진(별첨 사진첩 참조)

Ⅲ		향후계획

□ 스토리 텔링을 위한 존치 초소(2개소) 안내표지판 설치(‘19.11월중)

□ 문화재수리종합정보시스템(http://www.chis.or.kr) 수리보고서 등록 및 제출

□ 하자보수기간(2019.10.14.~2022.10.13)내 연 2회 이상 하자점검 실시

붙임   준공 사진첩 1부.  끝.