건설공사 설계변경 사전심의서

부분공개(5)

1. 공사명: 2019년 가락초 외 24개소 음수대 배관 설치공사

신청부서명	급수운영과
작 성 자	최 박
제 출 일	2019. 10. 31.

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시: 2019. 11. 1.(금)

- 심의의견: 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

김태형

11/01

김태형

타당함

위    원

시설운영팀장

송종학

송종학

타당함

위    원

주무관

김주경

김주경

타당함

위    원

주무관

임인택

임인택

타당함

위    원

주무관

양재덕

양재덕

타당함

담    당

주무관

최 박

최박

설계 변경 심의 의뢰서

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2019년 가락초 외 24개소 음수대 배관 설치공사

○ 공사기간: 2019. 6. 25.~2019. 11. 6.

○ 공사개요: 당초 D=15㎜, L=519m

변경 D=15㎜, L=601m

○ 도 급 액: 당초 금57,718,660원

변경 금70,567,000원

○ 발 주 청: 강동수도사업소(급수운영과)

○ 계 약 자: 홍성산업 주식회사 이희천

□ 설계변경 사유

○ 계약물량 증감

- 평화초, 정신여중, 잠신고 추가 설치

- 음수대 배관설치공사에 따른 공종별 물량 증가

○ 신공종 발생

- 거마, 오금가압장 천장 텍스설치, 펌프 및 히팅 케이블 외 2개 공종

□ 설계변경 금액 내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도급비	공급가액	52,471,510	64,151,825	-
	부가가치세	5,247,150	6,415,175	-
	계	57,718,660	70,567,000	-

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.