“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	관급자재 수량변경 요청

정동 역사재생활성화사업의 일환으로 추진중인 「정동지역 한양도성 순성길 연결공사」와 관련하여 관급자재 수량변경을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

□ 요청사항

업체명	품명/규격	수량(매/㎡/m)			단가 (원)	금액(원)
		당초	변경	증감		당초	변경	증감
동양기와	세라믹기와 전벽돌(토석) 190×90×57mm	47,994	45,518	감)2,476	1,100	52,793,400	50,069,800	감)2,723,600
	합계(계약금액)					52,793,400	50,069,800	감)2,723,600
통명석재	석재타일및판석 포천석(회백색류) 잔다듬, t100mm	901.5	1,030.0	증)128.5	86,720	78,178,080	89,321,600	증)11,143,520
	(옵션)v자형가공	0	10,700	증)10,700	1,870	0	20,009,000	증)20,009,000
	합계(계약금액)					78,178,080	109,330,600	증)31,152,520

□ 예산과목 : 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 도심 역사문화자원 관리, 정동 역사재생사업, 시설비및부대비, 시설비

붙임  합의각서 각 1부.  끝.

							역사도심재생과장
주무관							조장희			도심계획팀장					배성호					역사도심재생과장					11/01 代이기원
협조자				계약2팀장						이태영
시행			역사도심재생과-11855									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청 11층 역사도심재생과 (태평로1가)															/
전화		02-2133-8496						/전송			02-2133-0742					/	cjh8041@seoul.go.kr												/	부분공개(6)