문서번호	건축부-18851
결재일자	2019.11.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정호기		조영수	11/01 임인구
협조

「마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사」

1차공사 계약변경 및 2차공사 시행 검토보고

2019. 11.

도시기반시설본부

건 축 부

*********************

1차공사 계약변경 및 2차공사 시행 검토보고

「********************」와 관련 건설사업관리자가 1차공사 계약변경 및 2차공사 계약시행 요청이 있어 검토하고 보고함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : ********************

○ 총공사비(건축·토목·조경) : ****************************

○ 공사기간 : ‘18. 08. 01. ~ ‘21.05.31(1차: 19.11.11)

○ 시 공 자 : 주식회사 신성건설, 주식회사 엔씨종합건설

○ 건설사업관리용역업자 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소 외 1개사

○ 추진경위

- ‘18. 8.  1 : 공사착공

- ‘19. 9.  4 : 1차수 공사기간 연장(’19.9.8→ ‘19.11.11)

□ 계약변경 내용

○ 관련근거

- 토희마 CM-265(2019.10.25.) 1차수 계약변경 요청의 건

- 토희마 CM-266(2019.10.25.) 2차수 계약요청의 건

○ 계약변경 내용(총차, 1차, 2차분)

(단위:원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감	비 고
계약 금액	총 차	**************	**************	-	*****
	1 차	*************	*************	**************	내역조정
	2 차	***********	*************	*************	내역조정
공사 기간	총 차	********************	********************	-	*****
	1 차	*********************	*********************	-	*****

○ 계약변경 사유

***********************************************************

************************************************************

□ 2차공사 시행

○ 발주 계획

(단위: 원)

구 분		계약금액	공사기간	비 고
계약 금액	총 차	**************	***************************
	1 차	*************	***************************
	2 차	*************	***************************	*****

○ 예산과목: *************************************************************************************************

□ 건설사업관리자 의견

○ 기계약된 1차수와 계약할 2차수간의 계약내역 조정으로 총 공사비 및 총 공사기간의 변경없이 공사계약 범위내에서 차수간 계약내역 조정사항이므로 원만한 공사를 위하여 필요함.

□ 처리의견

○ 건설사업관리기술자의 검토의견이 적합하므로 차수간 계약내역조정으로 공사계약(1차분)변경계약하고 2차수 공사계약을 추친코자 함.

붙임 : 1. 1차 계약변경 및 2차 계약 요청에 대한 검토보고(건설사업관리단) 각 1부.

2. 1차 및 2차 계약변경 내역서 각 1부. 끝.