문서번호	토목부-19807
결재일자	2019.11.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
권해엽		장종환	11/01 김용제
협조	주무관		황윤기
	주무관		노순재

폐기물 처리용역 설계변경(1회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) 소각폐기물 처리용역 -

2019.10.

폐기물 처리용역 설계변경(1회) 검토 보고

- 동부간선도로 확장공사(1공구) 소각폐기물 처리용역 -

임시야적장 사용에 따라 추가 발생한 소각(가연성) 폐기물을 기계약된 소각폐기물 처리용역에 반영하여 처리하고자 보고드림.

※ 관련근거 : 토목부-15439호(2019.08.28.), 도화(감리) 2019-10233호(2019.10.18.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구) 소각폐기물 처리용역

○ 용역규모 : 가연성 소각 폐기물 51톤, 스마트송장시스템 1식

○ 용역금액 : 15,539,700원

○ 용역기간 : 2019.04.10. ~ 2019.12.31.

○ 용 역 사 : ㈜이알지서비스, 동성산업

□ 설계변경 및 주요내용

○ 용역비 변경 현황                                     (금액 : 원)

구 분		당 초	변 경	증・감	비고
1회	도급액	**********	**********	************
	용역기간	*************************	*************************	*

○ 설계변경 사유                                     (금액 : 천원)

NO	변 경 내 용	용 역 비		증·감	관 련 문 서
		당초	변경
1	가연성소각폐기물 처리	******	******	*********	********** *************
2	폐기물 운반 관리시스템(스마트 송장 반영)	*	***	********
합 계		******	******	**********

※ 기존계획(사토반출 후 순성토 반입)보다 35백만원 절감 효과

※ 향후 아레나사업(서울시 시행) 추진 시 소각폐기물(인조잔디, 우레탄 등) 철거 필요하며, 적기에 유용토 반출·입 불가 시 동부간선도로 20년 개통 차질

○ 물량 증·감(△) 현황

구 분	당 초	변 경	증・감	비고
임시야적장 사용에 따른 소각폐기물 추가 발생량	******	*******	*********

※ 단가 적용 : 수의 계약 용역(설계금액 대비 97.2%)임을 감안하여 신규 물량에 대해선 협의 결과 설계 금액 대비 90.45% 적용 결정

○ 폐기물 처리용역비 변경 현황                         (금액 : 천원)

구 분	공 사 비			비고
	당 초	변 경	증․감
1 폐기물 운반비
가연성소각폐기물 운반	*****	******	******
스마트송장시스템(1.5%)	*	***	***
2 폐기물 처리비
가연성소각폐기물 처리비	******	******	******
금액 조정	*	***	***
공급가액	******	******	******
부가가치세	*****	*****	*****
도급비계	******	******	******

○ 감리단 검토의견

- 소각폐기물 처리용역(1회) 변경 설계서 내용을 검토한 결과 변경 설계가 적정하게 반영된 것으로 판단됨.

□ 조치의견

○ 감리단 검토의견이 타당하여 예산 절감 및 동부간선도로 20년 개통에 차질이 없도록 폐기물 처리용역을 변경하고자 함.

붙임  감리단 검토 의견서 등 각 1부.  끝.