문서번호	서울특별시차량정비센터-13555
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	소장
김전연		김명국	11/04 代김명국
협조

2020년 차량정비센터 내진보강공사 추진 계획

2019. 11

서울시차량정비센터

2020년 차량정비센터 내진보강공사 추진 계획

차량정비센터에 대한 내진성능 평가결과 내진 B등급(보수)으로 평가됨에 따라 2019년 내진보강공사를 일부 시행하고, 미시행한 시설물에 대한 내진보강공사를 실시하여 안전성 강화에 만전을 기하고자 함.

1		목표 및 추진근거

○ 목   표 : 공공청사 “내진 A등급” 성능확보

○ 추진근거

- 지진 ․ 화산재해대책법 제16조(기존 건축물의 내진보강 추진 등)

- 서울시 지진방재 종합계획(시장방침 제163호(‘16.6.15)

□ 목  표 : “지진에 강한 서울 만들기”

□ 공공시설물별 내진평가 시행 후 건축물 단계적(‘16~’20)보강 추진

2		추진경위

○ 내진성능평가 시행 : 2017.8 ~ 2017.10

○ 건출물 평가결과 : B등급(붕괴방지 수준)

- 본관 : 벽체 균열 및 바닥 방수층 파손

- 기관반, 하체반 : 조적벽체, 파라펫, 기둥 수직 및 수평균열

- 변전소 : 기둥, 벽체 접합부 수직 및 수평균열

- 경비실 : 파라펫 수평 균열

- 대형정비동 : 조적벽체 수직 및 수평 균열

- 유류창고 : 파라펫 수직 및 수평 균열

- 간이정비공장 : 파라펫 수직 및 수평 균열

- 도장공장 : 파라펫 수평 및 조적벽체 수평 균열

3		사업추진 실적

○ 보강공법선정 : 벽식형 강제이력댐퍼(2019.5.29.)

○ 2019년 내진보강공사 실시 현황

대상	예산(백만원)	사업기간	보강내역
본관, 변전소, 대형정비동	500 시설비 : 465 설계비 : 20 감리비 : 15	2019.5.29. ~ 11.27 공법선정 : 5.29 실시설계 : 6.11~7.29 기술감리선정 : 7.29~7.31 내진보강공사 ; 8.26~11.27	댐퍼 12개 설치 (건물별 4개)

4		사업추진 계획

○ 사업개요

시설명		시설규모	시설 안전 등급	준공년도
서울시차량 정비센터	유류창고	연면적 141㎡, 지상1층	B	1995. 3. 9.
	간이정비고(임대) (한미,광림,미량)	연면적 411㎡, 지상2층
	기관반 정비고	연면적 214㎡, 지상2층
	하체반 정비고 107동	연면적 317㎡, 지상2층
	하체반 정비고 108동	연면적 323㎡, 지상2층
	차량검사소	연면적 491㎡, 지상2층

- 대    상

- 사 업 명 : 차량정비센터 내진보강공사

-  대    상 : 유류창고 및 기관반 정비동(5개 동)

-  사업기간 : 2020. 3 ~ 2019. 9

-  사 업 비 : 810백만원(시설비 765백만원, 감리비 15백만원,

실시설계비 30백만원)

-  사업내용 : 건물 5개동 내진보강공사 및 내부 수장공사

5		추진 일정

○ 내진보강공사 실시설계 용역 시행

-  실시설계용역 타당성 기술심사 : 2020. 3. 18

-  실시설계용역 업체 선정 : 2020. 4. 7

-  실시설계용역 결과 보고 : 2020. 4. 29

○ 감리용역 시행

-  감리용역 기술 타당성 의뢰 및 심사(2020. 5.6)

-  감리용역 업체 선정 : 2020. 5. 16

○ 내진보강 공법 : 벽식형 강제이력댐퍼

○ 공사 발주계획

-  입찰방법 : 일반경쟁입찰(2020. 5.20)

-  공사기간 : 착공일로부터 90일

-  입찰참가자격

□ 건설산업기본법 제9조 규정에 의한 “시설물관리유지업” 등록을 필한

업체로 조달청 입찰참가자격이 등록된 업체

○  예산과목

- 차량정비센터, 특화된정비체계 구축, 요율적인 차량정비, 차량정비센터         시설 유지보수, 시설비(401-01)